문서번호	토목부-6405
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
강청금		김상용	03/29
			代박운용
협조
	주무관		서호태

- 천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 -

저소음포장구간 관급자재 수량변경(우선 시공분) 검토보고

2024. 03.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 천호대교 남단IC 연결체계 개선공사-

저소음 포장구간 관급자재 수량변경

(우선 시공분) 검토보고

「천호대교 남단IC 연결체계 개선공사」의 저소음 포장 우선 시공을 위한 관급자재 수량변경을 검토보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경)

ㅇ 천호 남단(감리) 제2024-060호(2024.03.28.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 천호대교 남단IC 연결체계 개선

ㅇ 공사규모 : 연결로 개설(1차로) 2.95km(지하차도 L=194m)

ㅇ 도 급 비 : 26,413백만원(3차 2,850백만원)

ㅇ 공사기간 : 2014.02.~2025.11.(3차 2023.08.~2024.05.)

ㅇ 시 공 사 : 대우산업개발(주) 외 1개사

ㅇ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외 4개사

□ 추진경위

ㅇ '14.02.         : 타당성 조사 및 기본계획 시행계획 방침

ㅇ '15.07.         : 개선사업 추진계획 보고

ㅇ '16.06.~'20.04. : 기본 및 실시설계용역

ㅇ '20.09.~'20.11. : 공사 및 건설사업관리용역 착수

ㅇ '22.04.~'23.11. : 문화재 관련 유관기관 협의 및 전문가 자문회의

ㅇ '24.02.         : 문화재 발굴에 따른 사업계획 변경 검토요청(토목부→도로계획과)

ㅇ '24.03.현재     : RAMP-A,D 배수구조물 공사(공정율:20.2%)

□ 검토내용

ㅇ **********************************************************

ㅇ *****************************************************

ㅇ **********************************

ㅇ 관급자재비 증·감 현황

(단위:천원)

***	**	***		***		**********		**
		**	**	**	**	**	**
*****			*******		*******		*********
*********	***	*****	*******	***	*******	*****	*********
*******	*	*	*****	*	*****	*	*****

□ 조치계획

ㅇ 저소음 포장구간 관급자재 수량변경 실정보고는 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 원활한 사업추진을 위하여 실정보고를 승인하고 추후 설계변경 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.