하나되는 중구, 함께하는 중구
	서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	「2023/2024 중구제설작업 민간위탁 용역(총차, 2차)」설계변경(정산) 시행

우리 구에서 시행 중인「2023/2024 중구제설작업 민간위탁 용역(총차, 2차)」에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2023/2024 중구제설작업 민간위탁 용역(총차, 2차)

나. 용역기간 : 2023. 11. 22. ~ 2024. 3. 31.

- 2차분 : 2024. 1. 15. ~ 2024. 3. 31.

다. 용역금액 : 금549,234,800원(금오억사천구백이십삼만사천팔백원)

- 2차분 : 금247,504,800원(금이억사천칠백오십만사천팔백원)

라. 계 약 자 : ㈜신영기업 대표 장성호

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
용역비	총차	549,234,800	574,800,000	증) 25,565,200	부가세 포함
	2차	247,504,800	273,070,000	증) 25,565,200

바. 설계변경사유 : 기상이변에 따른 잦은 강설로 제설작업 물량 증·감 발생 등

사. 예산과목

- 재난안전관리실 재난안전정책과, 재해 및 재난 예방, 재난예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비및부대비, 시설비 – 120,000,000원

- 도로시설과, 재해 및 재난 예방, 재해 예방관리, 제설대책 운영, 민간이전, 민간위탁금(시비) - 120,000,000원

- 도로시설과, 재해 및 재난 예방, 재해 예방관리, 제설대책 운영, 민간이전, 민간위탁금(구비 사고이월비) - 33,070,000원

붙임  1. 설계변경(정산)내역서(총차, 2차) 1부.

2. 설계변경(정산)보고서 1부.  끝.

주무관	조상희		도로관리팀장	권익생		도로시설과장	어원철		안전건설교통국장	03/29
문성수
협조자	주무관	신주희		계약팀장	왕지영		재무과장	도순심
기획재정국장	송인상
시행	도로시설과-3769	(	2024. 3. 29.	)	접수		(		)
우	04558	서울특별시 중구 창경궁로 17, 중구청 본관 7층 (예관동)	/	http://www.junggu.go.kr
전화	02-3396-6112	/전송	02-3396-8441	/	rhrnfuaos@junggu.seoul.kr	/	부분공개(5)