문서번호	치수과-5080
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)

주무관		하수팀장		치수과장		건설교통국장
김근옥		차순택		김재준		03/29
						代강영호
협조

「용두동 130-24 일대 하수관로 정비공사」

준공기한 연기 검토보고

▢  공사개요

❍ 공 사 명 : 용두동 130-24일대 하수관로 정비공사

❍ 사업기간 : ’23. 8. 16. ~ ’24. 4. 30.

❍ 도 급 비 : 797백만원

❍ 사업내용 : 하수관개량 D=300~1,200mm, L=780m 등

❍ 도 급 사 : 세인트건설 주식회사 대표자 조용진

▢  준공기한 연기

❍ 연기사유 : 도로굴착통제(’23. 12. 1. ~ ’24. 2. 28.)에 따른 절대공기 부족

❍ 준공기한 연기

- 당초 : 2023. 8. 16. ~ 2024. 4. 30.

- 변경 : 2023. 8. 16. ~ 2024. 7. 30.

❍ 연기사유 귀책소재 : 동대문구청

❍ 지연배상금 부과여부 : 미부과

동대문구

[치수과]

사전 검토 항목
✍ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다.
구 분	사전 검토항목 점검 사항
문서공개	●	결재문서 공개여부를 검토하였는가?					공개 □ 부분공개 □ 비공개 ■
구정비전 반영사항	●	사업목표	:	쾌적 □ 안전 ■ 투명 □ 미래 □						무 □
역점사업 반영사항	●	사업목표	:	꽃의 도시 □ 걷기 좋은 도시 □ 탄소중립도시 □ 아이 키우기 좋은 도시 □ 스마트도시 □ 재해Zero 도시 □						무 ■
고객감동 행정발전	●	(계획수립) 민원발생 소지를 파악하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 사전 주민홍보 방안은 마련하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 지난년도 보다 개선하여 수립하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 다른 사무와의 중복여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 일몰제 적용 대상 여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(결과보고) 민원해결, 발생사유 등을 분석하였는가?						유 □		무 ■
법령검토	●	법령	:	유 ■	(법규명 : 지방계약법 등				)	무 □
	●	방침, 지침 등	:	유 □	(				)	무 ■
	●	전문가 자문 등	:	유 □	(				)	무 ■
기관협의	●	상급기관	:	중앙 □ 서울시 □ 기타 □						무 ■
	●	관계부서	:	유 ■	(	부서명 : 재무과			)	무 □
	●	기타(민간단체 등)	:	유 □	(	단체명 :			)	무 ■
재원확보	●	확보방안	:	국비 □ 시비 □ 자체 ■ 기타(민자,협찬) □						무 □
절차검토	●	추진절차	:	투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 □						무 ■
주민참여 갈등관리	●	주민참여	:	설명회 □ 의견청취 □ 기타 □( )						무 □
	●	민원소지	:	민원발생 가능 □						무 ■
			:	복합민원 □ 단순민원 □
			:	다수민원 □ 단수민원 □
	●	해소방안	:	대책마련 □ 이해·조정 □
홍보계획	●	홍보수단	:	기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □ 기고문 □ 인쇄물 □ 기타 □ (IPTV, DID등)						무 ■
청렴성 검토	●	사업목표	:	부패방지 □ 청렴도 향상 □ 공직자 행동강령 준수 □ 청렴한 공직문화 확립 □ 청렴역량 강화 □						무 ■
여성친화도시조성	●	사업목표	:	성평등 □ 여성의 경제 ‧ 사회참여 확대 □ 안전증진 ■ 가족친화 □ 여성의 지역사회 활동역량 강화 □						무 □

	｢용두동 130-24일대 하수관로 정비공사｣ 준공기한 연기 검토보고

우리 구에서 시행하고 있는 「용두동 130-24일대 하수관로 정비공사」의 준공기한 연기에 관한 검토보고임

Ⅰ	추진근거

세인트건설 24-0327-1호 : 준공기한 연기 제출의 건

Ⅱ	공사개요

공 사 명 : 용두동 130-24 일대 하수관로 정비공사

공사기간 : 2023. 8. 16. ~ 2024. 4. 30.

공사규모 : 하수관로 개량 D300~1,200mm L=780m 등

도 급 비 : 금797,935천원

도 급 자 : 세인트건설주식회사 대표자 조용진

Ⅲ	추진현황

2023. 8. : 공사 발주

2023. 8. : 공사 계약

2023. 8. ~ 2024. 4. : 공사 시행

Ⅳ	보고내용

보고내용

❍ 「용두동 130-24일대 하수관로 정비공사」의 절대공기가 부족한 실정임

※   사 유 : 동절기 굴착통제에 따른 공사 시행불가

- ’23/’24년도 동절기 도로굴착통제 시행[도로과-20390(2023.11.10.)호]

- 통제기간 : 2023. 12. 1. ~ 2024. 2. 28.

- 통제대상 : 도로굴착을 수반하는 모든 공사

조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 절대공기가 부족함에 따라 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

준공기한 연기 개요

공 사 명	계 약	착 수	준공기한		비 고
			당 초	변 경
용두동 130-24일대 하수관로 정비공사	2023. 8.16.	2023. 8.21.	2024. 4.30.	2024. 7.30.	91일 연장

❍ 연기사유 귀책소재 : 동대문구청

❍ 지연배상금 부과여부 : 미부과

Ⅴ	향후계획

2024. 7. : 설계변경 및 공사준공

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 제출의 건 1부.  끝.