아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[청사 환경개선 본관 1층 리모델링 공사(전기공사)]

우리 사업소에서 시행 중인「청사 환경개선 본관 1층 리모델링 공사(전기공사)」와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 청사 환경개선 본관 1층 리모델링 공사(전기공사)

2. 변경내용

계 약 자	계약금액		계약기간		비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
*********	************	****	********* **********	********* **********	****

3. 계약금액 : 변경없음

4. 지체상금 부과 : 미부과

5. 변경사유 : 천정 내부 각종 지장물(배관, 배선)로 인해 원활한 공사 진행이 되지 않으며, 배선 작업 진행시 지장물에 의한 기존 전기선의 단락(쇼트)이 빈번하게 발생으로 공정지연

6. 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(건물)

붙임  1. 청사 환경개선 본관 1층 리모델링 공사(전기공사) 준공기한 연장 검토 보고 1부

2. 준공기한 연기 요청 공문 및 준공기한 연기원 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관	이상욱		행정관리팀장	정선이		행정지원과장	04/01
홍기관
협조자	주무관	박종배
시행	행정지원과-6827	(	2024. 4. 1.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 행정지원과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4416	/전송	02-3146-4479	/	dnr7565@seoul.go.kr	/	부분공개(7)