문서번호	급수운영과-5671
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
김동하	박상열	代박상열	03/29
			김정윤

장기계속 단가계약공사 발주계획

(2024년 서대문구 관내 상수도공사)

2024. 3. 29.(금)

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

장기계속 단가계약공사 발주계획

「2023년 서대문구 관내 상수도공사(단가계약공사)」의 도급액이 계약만료 전에 소진될 것으로 예상됨에 따라 2024년도 서대문구 관내 상수도공사를 발주코자 함.

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사

ㅇ 공사개요: ******************

ㅇ 공사기간: 2023. 7. 3. ~ 2024. 6. 30.

ㅇ 계약금액: ***********

ㅇ 도 급 자: **************

Ⅱ		보고내용

ㅇ 본 공사는 서대문구 관내 급수공사 및 유지관리 등을 위하여 시행하는 공사로써

ㅇ『2023년 서대문구 관내 상수도공사』의 계약기간이 2024. 6. 30. 만료예정이고 계약금액의 소진이 예상됨에 따라 원활한 업무수행을 위하여『2024년 서대문구 관내 상수도공사』의 발주가 필요한 실정임

ㅇ 예산 집행현황

(단위: 원)

공사명	계약금액	집행금액	집행잔액	비고
2023년 서대문구 관내 상수도공사	*************	***********	***********	잔액 39%

Ⅲ		조치계획

ㅇ『2023년 서대문구 관내 상수도공사』는 금번 발주 공사의 착공시점에 맞춰 준공처리하고

ㅇ『2024년 서대문구 관내 상수도공사』를 아래와 같이 시행코자 함

	〈 발 주 개 요 〉
• 공 사 명: 2024년 서대문구 관내 상수도공사 • 공사지역: 서대문구 관내 • 공사규모: ********************* • 총공사비: *********** *************************************************** • 공사기간: 계약일로부터 2025. 6. 30.까지 • 설계기준: 2024년 상수도공사 기본 품셈단가표(3개년 평균 물량 적용) • 계약방법(입찰방법): 일반경쟁입찰 ※ 관련근거: 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제21조(장기계속계약)

Ⅳ		향후계획

ㅇ 2024. 4월: 공사계약 심사요청(본부 안전조사과) 및 일상감사 실시

ㅇ 2024. 4월: 계약의뢰

ㅇ 2024. 5월: 계약 및 착공

붙임  설계내역서 1부.  끝.