문서번호	건축부-5132
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	건축설계과장	건축부장	시설국장 직무대리
홍정희	홍순명	소영수	04/01
			이승석

「50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사 건설사업관리용역」

총차 및 1차 용역기간 연장 검토보고

2024. 3.

도시기반시설본부

[ 건 축 부 ]

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사 건설사업관리용역」

총차 및 1차 용역기간 연장 검토보고

「50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사」관련 건설사업관리용역사업자로부터 계약기간 변경(총차, 1차) 요청이 있어 검토보고 드림.

1		용 역 개 요

○ 용 역 명: 50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사 건설사업관리용역

○ 용역업체: ㈜이가에이씨엠 건축사사무소 외 1

○ 용역기간: **************************

**************************

○ 계약금액: **********************************

○ 용약 계약 현황

구 분	용역기간	계약금액(천원)	비 고
총 차	******************	*********	-
1 차	******************	*********	-

.

2		추 진 경 위

○ ******************

○ ************************

○ **************************************

3		계약변경 내용

○ 관련근거

-‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’제22조, 같은법시행령 제75조 및 시행규칙 제74조

-‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준’제14장 용역계약일반조건 제7절 2. 계약기간의 연장

- ******************************************

○ 변경 현황

단위: 기간(일), 금액(천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
계약기간	총차	********* *********	********* **********	*****
	1차	`******** *********	********* **********
계약금액	총차	*********	*********	****
	1차	*********	*********

******************************************

○ 변경 사유

- ****************************************

4		처 리 의 견

○ ******************************.

붙임  ****************************.  끝.