문서번호	설비부-5965
결재일자	2024. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비설계과장	설비부장
황필권		조기성	04/03
			신용휴
협조

내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사 가로등주 변경검토 보고

2023. 11. 27.

도시기반시설본부

(설 비 부)

내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사

관급자재 변경계약 검토보고

설비부장 : 신용휴☎6438-2308 설비총괄과장 : 조기성☎2350 담당 : 황필권☎2351

「내부순환로(월곡IC)구조개선공사」와 관련하여 공사구간 중 간섭되는 지점으로 인한 변경사항을 보고하고, 원활한 공사진행을 위해 우선 관급자재(가로등주)에 대한 변경계약 진행하고자 함.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사

ㅇ 공사위치 : 성북구 하월곡동 37번지 일대(월곡역 주변)

*********************************.

****************

〈 공사구간 개요도 〉

L=465m

공사시점

공사종점

정릉

종암

사거리

월곡역

태릉

코업스타

클래스

가로등주 간섭구간

북부간선도로

□ 관련근거

ㅇ 가로등주 변경 구매요청(월곡IC)(월곡감24-154호(2024.4.2.)

ㅇ 물품 다수공급자 계약특수조건 제7조(수정계약)

□ 현장여건 상황 및 감리의견

ㅇ 신설교량과 기존 북부간선도로가 교차지점에서 간섭에 설계높이(10m)로 가로등주 시설 불가로 4m용(보안등용)로 축소 필요

ㅇ 노면휘도 및 균제도를 도로조명기준에 맞추기 위해서 추가 조명 설치가 필요하며, 설치방법에 대한 검토에는 소요일정 필요

ㅇ 통신공사, 토목공사 진행을 위해 조속한 가로등주 설치가 필요하기에 우선적으로 관급자재 변경을 요청

〈 현장 실측 사진 〉

• 3번 가로등 : 북부간선도로 구조물 (철망)과 4.5m 구간에서 간섭	• 4번 가로등 : 북부간선도로 구조물 (철망 및 배수관)과 4.0m 구간에서 간섭

□ 검토의견

ㅇ 현장여건에 따라 가로등주의 높이 변경은 타당하며, 임박한 준공일에 맞춰 빠르게 가로등주 수급이 필요하므로, 가로등주 변경요청은 타당함

ㅇ 타공사에 대한 영향이 크게 없는 등기구의 경우에는 향후 도로조명기준 맞는 조명설비 추가설치 검토에 맞춰 변경토록 함

□ 관급자재 변경계약 내용

ㅇ 변경내용 : 물품의 변경

ㅇ 변경사유 : 현장여건에 따른 등주높이 조정 필요

구 분	규 격	단위	당 초	변경	증·감	비고
가로등주	10m 1등용	ea	4	2	-2
	10m 2등용	ea	4	4	-
	4m 1등용	ea	-	2	2
	계	ea	8	8	-

□ 향후계획

ㅇ 총무부에 관급자재 변경계약 의뢰

ㅇ 도로조명기준에 맞춘 추가 등기구 설치 검토 및 추진

붙임: 가로등주 변경 구매요청(월곡IC) 1부.  끝.