문서번호	한강문화관광과-2683
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한강문화관광과장
김세정		04/04
		안신훈
협조

뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설치 위한 건축 공사 설계변경정산 보고

뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설치 위한

건축 공사 설계변경(정산) 보고

2024.  4월

미 래 한 강 본 부

(한강문화관광과)

뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설치 위한

건축 공사 설계변경(정산) 보고

한강사업총괄부장 :윤석환☎3780-0865 한강문화관광과장 : 안신훈☎0765 담당 : 김세정☎0796

뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설치 위한 공사의 설계변경(정산) 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 계약기간 : 2023. 12. 6. ~ 2024. 4. 5.

ㅇ 계약상대자 ; 주식회사 지엘컴 (대표:조중규)

ㅇ 계약금액 : 225,230,580원

□ 변경사항 검토보고

ㅇ 변경 및 정산사유 : 노유자시설로 용도변경 위한 시설물 보완 및지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제8절 보험료 사후정산 등

ㅇ 변경에 따른 증·감 내역

구 분	내 용	증·감액	비 고
**	********* *********** *********	***********	*
**	************* ********	************	*

※ 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 건설근로자 퇴직공제부금, 산업안전보건관리비  : 실비정산

ㅇ 정산에 따른 증·감 내역

당 초	변 경	증·감액	비 고
************	************	************	*

□ 향후계획

ㅇ 상기와 같이 노유자시설로 용도 변경 위한 시설물 보완 공정 추가, 보험료, 건설근로자 퇴직공제부금, 산업안전관리비 등을 사후 정산한 금액으로 설계변경 후 준공 처리

□ 협조사항

ㅇ 총무과	설계 변경 및 준공 처리 협조

※ 첨부 : *********** 각 1부.  끝.