문서번호	설비부-6082
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
정성호		곽용길	04/04
			신용휴
협 조

「서울사진미술관 건립 기계공사」

관급자재(빌딩자동제어) 설계변경 검토보고

2024. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울사진미술관 건립 기계공사」

관급자재(빌딩자동제어) 설계변경 검토보고

『서울사진미술관 건립 기계공사』관급자재(빌딩자동제어)와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토보고 드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 서울사진미술관 건립 기계공사

ㅇ 위    치 : 서울특별시 도봉구 마들로13길 70(창동 1-7)

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,048.52㎡

ㅇ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	******	**	**********************	*************
		**	***********************	*************

ㅇ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소 근정 외 1개사

□ 관련근거

ㅇ 서울사진미술관 건립 기계공사 빌딩자동제어 제작구매 스마트안전적용 실정보고 [KDU(대외, 사진) 제24-116호(2024.4.1.)].

ㅇ 실정보고 승인 통보(서울사진미술관 건립 스마트 안전기술 적용여부 검토 승인)[설비부-4612호(2024.3.13.)]

□ 검토내용

ㅇ 설계변경 사유

******************************************

ㅇ 주요물량 증가 사항

품 목	규 격	단 위	수 량			비 고
			당초	변경	증감
***********	***********************	**	**	**	***
***************	********************	**	*	*	***
*****	********************	*	***	***	*****
*****	***	*	***	***	*****

ㅇ 도급비 변경 내역

(단위 : 원)

***		****	****	*******	****
* * * * * *	***	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	***********
	*****	*********	*********	*********
	****	*********	*********	*********
	****	*********	*********	*********
*****		**********	**********	*********
**		**********	**********	***********
*******		**********	**********	***********
*		***********	***********	************
*****		**********	**********	***********
**		***********	***********	************

ㅇ 계약금액 변경내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
******	***********	***********	************

□ 감리단 검토의견

ㅇ 스마트안전기술 적용(집수정 수위계 이중화) 수량 및 금액 변경은 적정하다고 사료됨

□ 보고자의견

ㅇ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 계약부서(총무부)에 설계변경 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝