문서번호	급수운영과-5368
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
유성원	김종섭	04/04
		이규희

급수공사 작업기간 연기 보고

(신설-10, 신설-68, 개량-68)

2024.  4.

강동수도사업소

(급수운영과)

급수공사 작업기간 연기 보고

(신설-10, 신설-68, 개량-68)

「2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(연간단가)」업무 수행 중 급수공사 작업기간 연기 신청서가 접수되어 다음과 같이 보고함.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 공사기간: 2023. 6. 15. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약금액: ************

○ 계약업체: **************

□ 접수내역

○ 급수공사 현황

연번	지시번호	주 소	수요가	당초	변경	비고
1	신설-10	*********	***	************ **************	************ **************
2	신설-68	*********	*****	************ **************	************ **************
3	개량-68	**********	*****	************ **************	************ **************

○ 연기사유

연번	지시번호	연기 사유
1	신설-10	공사 중지 상태, 수요가의 공사 연기 요청
2	신설-68	공사현장 자재적치 및 건축 공정상의 이유로 수요가의 공사 연기 요청
3	개량-68	문화재연구소의 일정 때문에 입회 불가로 공사 연기

□ 지연배상금 부과 여부

○ **********************************

□ 조치사항

○ *********************

붙임  1. 공사 연기 요청서(신설-10)

2. 공사 연기 요청서(신설-68)

3. 공사 연기 요청서(개량-68)  끝.