문서번호	급수운영과-5338
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김다솜	김종섭	04/04
		이규희

급수공사 작업기간 연기 보고

(신설-67, 보호통-31, 개량-74, 75)

2024.  4.

강동수도사업소

(급수운영과)

급수공사 작업기간 연기 보고

(신설-67, 보호통-31, 개량-74, 75)

「2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(연간단가)」업무 수행 중 급수공사 작업기간 연기 신청서가 접수되어 다음과 같이 보고함.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 공사기간: 2023. 6. 15. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약금액: ************

○ 계약업체: **************

□ 접수내역

○ 급수공사 현황

연번	지시번호	주 소	수요가	당초	변경	비고
1	신설-67	*********	******	*********** **************	*********** **************
2	보호통-31	*******	***** ***	************* **************	************* **************
3	개량-74	*******	***** ***	************ **************	************ **************
4	개량-75	********	***	*********** **************	*********** **************

○ 연기사유

연번	지시번호	연기 사유
1	신설-67	수요가 측 공사일정 지연으로 인해 준공기한 연기
2	보호통-31	보호통 공사와 개량(밸브) 공사를 동일 날짜에 시행하고자하며, 경찰서 도로공사 신고 승인 절차 진행중으로 준공기한 연기
3	개량-74
4	개량-75	공사 시 수요가 측에서 입회 요청하여 일정 조율로 인해 준공기한 연기

□ 지연배상금 부과 여부

○ **********************************

□ 조치사항

○ *********************

붙임  공사기간 연기 요청서 1식.  끝.