아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「서울숲 곤충식물원 지열 전기공사」 설계변경 요청

1. 시설과-2690(2024.4.4.)와 관련입니다.

2. 「서울숲 곤충식물원 지열 전기공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명: 서울숲 곤충식물원 지열 전기공사

나. 요청내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
공사기간	2023.11.30.~2024.4.8.	2023.11.30.~2024.4.8.	변동없음
공사금액[원]	************	************	**************

다. 변경 사유: 전력공급을 위한 선로 신설에 따른 공사금액 증가

라. 책임 소재 및 지체 상금 부과 여부: 시설과, 미부과

마. 예산과목: 동부공원여가센터 시설과, 에너지 생산·소비 최적화, 신재생에너지 보급, 공공시설 신재생에너지 보급 및 관리, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 기후환경본부 녹색에너지과)

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.

	시 설 과 장
주무관	황예서		시설관리팀장	김현태		시설과장	04/05
하종식
협조자
시행	시설과-2719	(	2024. 4. 5.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 시설과 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2965	/전송	02-460-2971	/	yshwang13@seoul.go.kr	/	부분공개(5)