문서번호	시설관리과-6586
결재일자	2024. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
이영동	최경서	강수성		04/05
				代김호남
협 조

『2023년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치및보수공사』

3차 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

2024. 04.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『2023년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

3차 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

시설관리과장:강수성☎3146-2790 시설관리팀장:최경서 ☎2801 담당: 이영동☎2798

『2023년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』의 3차 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과를  보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명: 2023년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

□ 공사규모: 밸브 및 변실정비 125개소

소화전보수 67개소

□ 공사기간: 2023. 4. 7. ~ 2024. 6. 30.

□ 공 사 비: ************

□ 도 급 자: 수진건설산업(주) 대표 한진구

2		설계변경 현황

□ 설계변경 사유

○ 현장여건 변화에 따른 시공물량 증·감

○ 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증감

□ 설계변경 세부내역

○ 붙임 설계변경 내역서 참조

□ 공사비 변경내역                                       (단위:원)

구 분	공사비		증·감	비 고
	당 초	변 경
총부기금액	***********	***********	*************
1차수	***********	***********	*	2023.04.07.~ 2023.12.31.
2차수	***********	***********	*************	2024.01.01.~ 2024.06.30.

3		심의위원회 개최 결과

□ 설계변경 심의위원회 개최 결과

○ 개최일자 : 2024. 04. 05.(금) 14:00

○ 개최장소 : 동부수도사업소 시설관리과

○ 참석위원 : 시설관리과장 외 4명

□ 검토내용

○ 물량변경 및 단가 적용 등의 적정성 여부

○ 신규공종 적정성 여부

○ 관련법규 및 규정 적법성 여부

○ 설계변경 세부내용 및 사유 등 타당성 여부

□ 심의결과

○ 설계변경 사항이 "적정함"

4		향후계획

□ 심의위원회 결과에 따른 설계변경 시행 및 행정지원과에 변경계약 의뢰

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 3차 설계변경 내역서 1부.  끝.