문서번호	정수시설과-987
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노운학		함태광	04/08
			김재웅
협 조

2024년 구의아리수정수센터

토목건축 정수 시설물 유지관리공사 발주 계획

2024. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 구의아리수정수센터

토목건축 정수 시설물 유지관리공사 발주 계획

「2023년 토목·건축 시설물 정비공사」와 관련 계약이 만료(2024. 6. 30.) 예정에 있어 정수장 시설물의 원활한 유지관리를 위하여 2024년도 연간단가 시설물 유지관리공사에 대하여 발주계획을 보고드림.

□ 관련근거 및 추진방향

ㅇ 관련근거

- 본부 안전조사과(2024. 2. 27.), 「2024년도 상수도공사 기본품셈단가표 및 포장복구

공사 품셈단가표 게시 배포」

ㅇ 추진방향

- 정수장 토목,건축 시설물 정비공사를 연간단가 계약으로 조기 발주하여       수의계약 대상 건수 감축으로 업무처리의 투명성을 높이고,

- 전문 공사업체와의 연간단가계약 체결로 시설물 유지관리의 효율성을

제고하고자 함.

□ 추진개요 및 유지관리 계획

ㅇ 추진개요

- 기간: 2024. 5. 1.~2025. 6. 30.

- 대상: 정수센터 토목, 건축 정수 시설물

- 방법: 추진계획 및 본부 설계지침에 의하여 시행

ㅇ 유지관리 계획

- 2023년 정밀안전진단 결과 보수보강(1순위) 정비

- 정수 시설물 노후, 손상 마감재 등 정비

- 착수정, 응집침전지 등 안전시설 설치 정비

□ 발주계획

*******************************************

*************************

*****************************

******************************

***********************************************             **********************************            ****************************

ㅇ 주요 적용사항

- 2024년도 상수도공사 기본품셈단가표 및 포장복구공사 품셈단가표

게시 배포[본부 안전조사과(2024. 2. 27.)]

- 대한건설협회 발표「2024년 건설업 임금실태 조사 보고서」단가

- 2024년 1월 1일 조달청 기준 토목공사 원가계산 제비율 적용

□ 계약방법

ㅇ 계약방법: 제한경쟁

- 국가를당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조(단가계약)

ㅇ 입찰참가자격:

****************************************************************************************************************************   **************************************************************************************************************************************************************

□ 세부 추진계획

ㅇ 2024. 4. 9.  : 본부 안전조사과 계약심사 의뢰

ㅇ 2024. 4. 16. : 계약심사 결과 반영 및 계약의뢰(본청 재무과)

ㅇ 2024. 5.     : 계약 및 착공

ㅇ 2025. 6. 30. : 공사 준공

붙임  1. 현장설명서 및 시방서 각 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.