문서번호	시설보수과-2222
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		임형규	04/08
			代최재성
협조

『여의2교 보수공사』 발주계획 검토 보고(변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 04

강서도로사업소

[시설보수과]

『여의2교 보수공사』

발주계획 검토 보고(변경)

2024년도 본예산 사업으로 추진 예정인『여의2교 보수공사』에 대한 발주계획 검토 보고 임

******************

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 여의2교 보수공사(2024년)

□ 위    치 : 영등포구 여의도동 18 ~ 영등포동 84(여의2교)

□ 사업개요 : 보도부 박층포장 8.8@ 교면방수 880m2 등

□ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 180일간

□ 사 업 비 : 530백만원

※ 예산과목 : 교량안전과,교량관리, 일반교량 관리,여의2교보수공사,시설비및부대비,시설비

Ⅱ		그간 추진사항

□ 추진사항

○ 2024년도 본 예산 : 530백만원

○ 2024.02.27 : 제품선정위원회 개최 및 결과보고

- 선정제품 : SMP-C 칼라 박층포장재(조달혁신제품 - 관급자재 구매)

○ 2024.03.28 : 계약심사 요청(도급비:356,510천원. 관급비:163,900천원)

************************************

Ⅲ		추진계획

□  공사비 : 총 530,000천원

○ 도급비 356,510천원, 관급비 163,900천원(관급자설치), 이전비 9,590천원

□  발주방법

○ 일반경쟁입찰 : 지역제한(추정가격 10억미만 전문공사)

※ 행정안전부 예규·고시 제89호(2019.10.8.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장(제한입찰 운영요령)

□  입찰참가자격

********

******************************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************

****************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************

*******************************************************************************************

**************************************************************************

***********************************

□  기타

○ 건설폐기물 처리

- 소요예산 : 5백만원

- 처리물량 : 폐아스콘(혼폐) 47톤

- 발주방법 : 별도 통합발주 예정

Ⅳ		향후계획

□ 2024. 4월 : 공사발주 및 입찰공고

□ 2024. 5월 : 계약 및 착공

□ 2024. 5월 ∼ 11월  : 공사시행 및 준공

따로붙임  공사설명서 1부.

계약심사결과 1부.

관련공문 1부.   끝.