문서번호	정수시설과-4091
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		김영준	04/08
			전종원
협조
	주무관		박소현

풍납취수장 소방공사 관급자재(물탱크)

납품기한 연기 검토보고

2024. 4.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 소방공사 관급자재(물탱크)

납품기한 연기 검토보고

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5678

우리 센터에서 추진중인「풍납취수장 환경개선 소방공사」에 필요한 자재의 납품기한 연기 소요가 발생하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

▢ 관련근거

○ "'풍납취수장 소방공사 관급자재(물탱크) 조달구매' 납품기한 연기요청의 건"에 대한 검토 보고 (MS24-0408-01호)

▢ 계약현황

○ 계 약 명 : 풍납취수장 소방공사 관급자재(물탱크) 조달구매

○ 계약업체 : 두리기업(주) (대표: 김창길)

○ 구매품목

*****************************************************************************************************************************

○ 구매금액 : 금6,269,960원 ※조달수수료 26,960원 포함

○ 납품기한 : 2024. 4. 16.

○ 인도조건 : 현장설치도

○ 하자담보책임기간 : 물품검사(수)일로부터 2년

▢ 계약 변경사항

○ 납품기한 연장

- 계약금액 변동 없이 납품기한을 아래와 같이 연장

·당 초 : 2024. 4. 16.  ->  변 경 : 2024. 5. 31.

○ 변경사유

*******************************************

***************************************************************************************************

▢ 검토내용

○ 검토자 의견

**************************************

************************************************

○ 조치계획

- 행정관리과에 납품기한 연기 요청

▢ 향후계획

○ '24. 4. : 납품기한 연기 의뢰

○ '24. 5. : 물품 납품 및 검수

붙임 : 1. 감리자 검토의견서 1부

2. 분할납품요구서(물탱크) 1부.  끝.