아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰-서서울미술관 건립공사 계측관리용역

1. 건축부-5458호(2024. 4. 8)와 관련입니다.

2. 우리부에서 추진중인 「서서울미술관 건립공사 계측관리용역」에 대하여 아래와 같이 계약금액 조정 및 기간 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 서서울미술관 건립공사 계측관리용역

나. 계약금액 : 금77,261,000원(금칠천칠백이십육만일천원)

다. 계약기간 : 2022.11. 2.~2024. 4.14

라. 계약업체 : ㈜엠에스이엔씨

마. 계약 금액 조정 및 기간 변경 내역

1) 계약금액 조정 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
공급가액	70,237,273	73,239,091	증 3,001,818
부가가치세	7,023,727	7,323,909	증300,182
도급액	77,261,000	80,563,00	증 3,302,000

2) 계약 기간 변경 내역

가) 계약기간 연기 내역

(당초) 2022.11. 2.~2024. 4.14 → (변경) 2022.11. 2.~2024. 5.31(증 47일)

나) 귀    책 : 도시기반시설본부

다) 지체상금 : 미부과

라) 연기사유 : 붙임 의뢰서 참조

바. 예산과목 : 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 서서울미술관건립(균형발전특별회계), 시설비(401-01) (예산편성부서 : 문화본부 박물관과)

붙임 1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.

	건 축 부 장
주무관	조동협		환경시설과장	윤용훈		건축부장	04/09
소영수
협조자
시행	건축부-5554	(	2024. 4. 9.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 14층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2421	/전송	02-6438-2459	/	yerom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)