문서번호	계측관리과-3338
결재일자	2024. 4. 11.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
김경호		이호완	04/11
			김분숙
협조

스마트검침·옥내누수분석시스템 유지관리 기성검사 결과보고(1분기)

2024.  4.

요금관리부

(계측관리과)

스마트검침·옥내누수분석시스템 기능개선 및 유지관리 용역

기성검사 결과보고

계측관리과장 :이호완 ☎2133-1250  담당 : 김경호 ☎1255

스마트검침·옥내누수분석시스템 기능개선 및 유지관리 용역 사업의 기성확인요청서가 제출됨에 따라 기성검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

1		관 련 근 거

□ 검사원지정요구서(재무회계과-4436호, 2024.4.9.)

2		사 업 개 요

□  사 업 명 : 2024년 스마트검침·옥내누수분석시스템 기능개선 및 유지관리 용역

□ 계약기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. (12개월)

******************

******************

******************

ㅇ 집행내역                               (단위:천원)

계약금액	선급금액(기 지출)	금회 기성액
*******	*******	******

※ 금회 기성액 중 선금정산액을 차감한 금액 지급 예정

□ 주요 과업내용

ㅇ 스마트검침·옥내누수분석시스템 기능개선

ㅇ 스마트검침·옥내누수분석시스템 운영 및 유지관리

ㅇ 기반 상용 S/W 유지관리

3		업무처리 실적

□ 추진기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 3. 31.

□ 유지관리: 총 42 건 (완료 23건, 진행중 19건)

구분		총 건수 (완료/진행중)
스마트검침시스템	1월	9 / 4
	2월	1 / 2
	3월	7 / 1
옥내누수분석시스템	1월	0 / 6
	2월	3 / 3
	3월	3 / 5

※ [붙임] 상세내역은 유지관리 결과 보고서 참조

□ 시스템별 주요 추진 실적

ㅇ 스마트검침시스템

- 시스템 기능/성능 문제점을 식별하고, 업무 계획 수립을 위한 통합테스트 실시

- 시스템 성능/정합성 향상을 위한 주요 추진사항 선정

• 검침데이터 파싱 성능 향상을 위한 수집서버 전환 및 프로그램 튜닝

• 데이터 정합성 향상을 위한 각종 백그라운드 프로그램 정비

• 서버 부하 저감 및 성능향상을 위한 DB Table 파티셔닝 실시

- 검침원점검 기능 개선: 검침방법 전환을 위한 검증절차 개선

- 현장 작업자용 모바일앱 기능 및 성능 개선 진행 중

ㅇ 옥내누수분석시스템

- 시스템 개선작업 착수

• 상세 일정계획 수립 및 화면정의서 작성

• 개선방안 설명회 및 현업(사업소 요금과) 요구사항 인터뷰 실시

□ 상용SW 정기점검: 이상없음

ㅇ 점검일자: 1월 5일, 2월 5일, 3월 5일

ㅇ 점검내용

- 운영프로세스 동작 및 환경파일 등 설정상태 점검

- 메모리 점유율, 로그파일 등 확인

4		향 후 계 획

□ 원격검침 수집서버 전환

ㅇ 구 원격검침 수집서버 -> 신규 서버로 기능 이관 및 테스트 실시

□ 시스템 성능 개선

ㅇ DB 주요 Table 파티셔닝 작업 진행

ㅇ 일별 데이터 생성 프로그램 개선

□ 주요 기능 개선

ㅇ 현장 작업자용 앱 기능 및 성능 개선

□ 데이터 정합성 확보

ㅇ 검침 데이터 분석을 통한 각종 경보상태값 검증 실시

□ 옥내누수분석시스템 아키텍처 및 기능 설계 실시

붙임  1. 유지관리결과보고서_스마트검침시스템(1분기) 1부.

2. 유지관리결과보고서_옥내누수분석시스템(1분기) 1부.

3. 정기점검보고서(1분기) 1부.

4. 기성확인요청서 1부.  끝.