아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장 (토목부장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시) 변경 및 기간연장 승인 통보〔월드컵대교 건설공사-양화인공폭포 공사구간〕

1. 토목부-6909(2024.4.5.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 월드컵대교 남단연결로(양화인공폭포 공사구간 등) 교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)에 대한 기간연장 요청에 대하여 아래와 같이 변경 승인하니 관련 시방기준을 준수하여 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명  월드컵대교 남단연결로(양화교) 교통안전시설(차선도색 등)

나. 변경구간  영등포구 양화동 주변(양화인공폭포 공사구간, Ramp-E,F)

다. 변경사유  양화인공폭포 공사를 위한 공사구간내 규제심의 변경으로 인한

물량 및 구간변경(차로우회 등)

라. 검토결과  ***********************

마. 공사기간  승인일로부터~ 2024.11.30.(공사완료시까지)

바. 공사승인조건

1) 준공전 tgis.seoul.go.kr에 시공사항 자료 입력 완료 후 준공

************************

2) 공사 완료 후 감리 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출

3) 휘도 및 두께 측정과 관련하여 축정일시, 축정지점 위치도(측정지점을 위치도에 표시), 측정사진 반드시 첨부

4) 서울시 노면표시 개정 시방 규정 적용.

5) 서울시 도로관리과-17008(2021.12.7.)호와 관련하여 "야간 빗길에도 밝은 차선도색" 을 위한 노면표시 추진에 따라 차선->상온경화형(5종), 문자· 기호->융착식(4종)을 적용하여 시공할 것.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	서효원		도로보수과장	전결 04/11
안동국
협조자
시행	도로보수과-3354	(	2024. 4. 11.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 도로보수과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-265-7952	/전송	02-2657-7960	/	cvgvsv77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)