문서번호	전시과-2352
결재일자	2024. 4. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	전시과장	서울시립과학관장
허민수	신혜영	04/11
		유만선

상설전시실 내 전시연계프로그램  현장 교육 공간 조성 추진 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 04. 11. (목)

서울시립과학관

(전 시 과)

상설전시실 내 전시연계프로그램

현장 교육 공간 조성 추진 계획(안)

상설전시실 내 전시물 연계프로그램 운영을 위한 소규모 단체 체험학습공간을 구현하고, 과학관에서 자체 개발한 공작물(교구·키트 등)을 전시하는 공간을 조성하여, 관람객의 능동적인 참여와 소통을 제고하고 고객만족도를 증대하고자 함

□ 추진 근거

ㅇ「과학관 설립·운영 및 육성에 관한 법률」제5조

□ 추진 배경 및 목적

ㅇ 과학의 양질의 프로그램과 운영에 따라 학교 단체 관람과 주말·방학 가족단위 관람객의 비중 높음

ㅇ 그러나, 상설전시실에서 전시물 연계프로그램 및 단체를 위한 적정한 체험공간 부족. 현재는 7~8인 수용 가능한 좌석과 공작물(교구·키트)을 만들기에 좁은 테이블로 구성되어 있음

ㅇ 소규모 단체 및 가족단위 관람객(15인)을 위한 수요자 중심의 전시물 연계 프로그램 공간 조성 필요

ㅇ 또한, 전시물 연계프로그램에 이용되는 공작물을 전시하는 공간을 마련하여, 과학관에서 지속적으로 개발·운영되는 다양한 프로그램과 공작물을 홍보함으로써, 관람객과 과학관과의 공감 경험 증대에 기여

□ 추진 개요

ㅇ 사 업 명 : 상설전시실 내 전시연계프로그램 현장 교육 공간 조성

ㅇ 기    간 : 2024. 4. ~ 10. (사업 수립, 설계, 제작설치, 시범운영)

ㅇ 장    소

1) G전시실 – 소규모 단체 관람객 체험공간

2) G·O·B전시실 - 교구·키트 전시 및 준비 작업공간

3) R전시실(상설/기획) - 전시안내데스크

ㅇ 사업내용

1) 전시물 연계프로그램 운영을 위한 단체체험학습공간(15인) 조성(1개소)

2) 교구·키트 전시공간 및 프로그램 준비 작업 공간(3개소)

3) 전시물 이동과 전시실 공간 변화에 따른 신규 안내데스크(2개소)

ㅇ 소요예산 : 금 83.4백만원(금팔천삼백사십만원)  * VAT 포함

ㅇ 업무분장

- 업무 총괄 : 전시과장

- 기획·개발 : 허민수 주무관, 김주희 실무관, 권오혁 실무관, 최선주 실무관

□ 추진 방향

1) 소규모 단체 관람객들을 위한 전시 연계프로그램 공간 구축

- G전시실 안내데스크와 전시물 재배치로 확보한 공간을 활용해 사이언스 쇼 및 이벤트 프로그램을 효율적으로 운영

- 투명한 파티션 및 부분적인 가벽을 설치하여 공간 분리와 개방감을 동시에 부여. 프로그램 참여자의 집중도를 높이고 외부에서도 프로그램 진행 모습을 볼 수 있도록 하여 과학관의 다양한 프로그램을 홍보하는 기회 제공

2) 교구․키트 전시 공간 및 프로그램 개발·준비를 위한 쇼룸(showroom) 조성

- 교구·키트 전시 공간 및 프로그램 개발을 위한 준비 공간을 오픈된 구조로 조성하여, 관람객이 외부에서 프로그램 개발·제작 과정을 관찰함으로써, 관람객의 호기심과 능동적인 참여를 유도

- 프로그램 미 운영 시, 과학관 운영직원의 프로그램 개발을 위한 회의 공간으로 활용

3) 전시물 이동과 전시실 공간 변화에 따른 신규 전시안내데스크 설치

- 전시물 품질관리(전시과-868)에 따라 전시물 이동과 전시실 공간 변화. 향후, 변경되는 상설전시실(R전시실)과 기획전시실의 효율적인 안내 및 운영을 위한 이동형 안내데스크 설치

□ 추진 내용

1) 소규모 단체 관람객들을 위한 전시 연계프로그램 공간 구축(G전시실)

공간도면		예시 이미지	<분리된 공간이자 개방감 있는 구조물>
필요기능	- 소규모 단체(15인) 프로그램 운영이 가능한 공작 테이블 및 의자(분리/적재 가능) 평소에는 전시 운영직원들 회의 공간, 프로그램 준비를 위한 작업 공간으로 이용 빔 프로젝터, 스크린, 음향시설 세트(기존 이벤트홀 시설 이전 설치) 벽면 진열장 및 물품 수납장 프로그램 운영 시 출입을 제한 할 수 있는 차단시설 및 공지 안내 입간판
연출방법	전체적으로 각이 없는 곡선형 마무리 전시실과 어느 정도 분리된 공간이자 개방감이 동시에 있는 구조물 설치 전시실 바닥과 단 차를 주거나, 바닥재를 변경하여 분리된 공간감 극대화
기타사항	기존 구조물 철거(G전시실 데스크)

2) 교구․키트 전시 공간 및 프로그램 개발·준비를 위한 쇼룸 조성(G·O·B전시실)

필요기능	4~5인이 작업 가능한 컴퓨터 데스크 및 의자 - 교구·키트 개발을 위한 도서 및 자료 등을 보관할 수 있는 수납공간 전시물 및 전시실 특색을 나타낼 수 있는 전시용 벽 및 쇼룸

① 공통 사항

주제 (키워드)	- 전시실 주제 : 공존(우리가 살고 있는 서울과 자연의 공존에 대한 전시물) 자연, 도시, 북한산, 모래, 암석, 태풍, 지진, 공기, 미세먼지, 바람, 한강, 물고기
공간도면		예시 이미지
연출방법	기존 전시공간과 어울리는 곡선형 구조로 디자인 심미성과 안정성 제고 G전시실의 특색에 맞게 데스크 전면 부에 인조 식물 및 암석(모래, 흙, 자갈 등)을 이용한 테라리움 콘셉트의 쇼룸 연출
기타사항	기존 구조물 철거(이벤트 홀 데스크, 탈의실 가벽)

② G전시실

주제 (키워드)	- 전시실 주제 : 생존(인간의 생존과 인간을 둘러싼 물질들의 특성에 대한 전시물) 생존, 질병, 인체, 화학, 원소, 원자, 분자, 유전, 감각, DNA
공간도면		예시 이미지
연출방법	기존 전시공간과 어울리는 곡선형 구조로 디자인 심미성과 안정성 제고 타 전시실에 비해 공간이 협소하여 데스크 뒤 벽면을 활용한 쇼룸 적용 O전시실 특색에 맞게 주기율표, 원소, 화학 관련 디자인요소 적용
기타사항	기존 구조물 철거(안내데스크)

③ O전시실

주제 (키워드)	- 전시실 주제 : 연결(인간과 복잡하게 연결되어 있는 시스템 속 과학에 대한 전시물) 교통수단, 뇌, 네트워크, 우주, 멀미, 자이로스코프, 거울, 빛, 단위, 속도측정
공간도면		예시 이미지
연출방법	기존 전시공간과 어울리는 곡선형 구조로 디자인 심미성과 안정성 제고 타 전시실에 비해 층고가 높아 천장을 활용한 쇼룸 마련 가능 B전시실 특색에 맞게 우주, 별자리, 단위 관련 디자인요소 적용 출입문 설치
기타사항	기존 구조물 철거(안내데스크, 창고 가벽)

③ B전시실

주제 (키워드)	- 상설전시실 주제 : 순환(도시의 혈액인 에너지의 생산 및 순환 과정 대한 전시물) 정전기, 친환경 에너지, 태양광, 컴퓨터, 적외선, 슐리렌, 열, 전기 기획전시실 : 과학기술 원리에 기반한 다양한 실험적인 기획전, 또는 전문가 협업전
공간도면		예시 이미지	<일체형 안내데스크>
연출방법	전체적으로 곡선형 구조 데스크 전면부에 톱니기어 모양의 입체적인 디자인요소 적용 *기어, 캠, 링크를 적용한 오토마타를 통해 순환과 운동의 개념 표현
기타사항	기존 구조물 철거(안내데스크) 전시실 구조 및 용도 변경으로 인해 데스크 근무 최소화 예정

3) 전시물 이동과 전시실 공간 변화에 따른 신규 전시안내데스크 설치

□ 향후 계획

ㅇ 사업 수립 및 업체 계약                   :  2024.4. ~ 5.

ㅇ 전시공간 및 가구/집기 설계               :  2024.6. ~ 7.

ㅇ 전시공간 및 가구/집기 제작설치(시범운영)  :  2024.8. ~ 10.

□ 소요 예산

ㅇ 예산금액 : 금83.4백만원(금팔천삼백사십만원)  * VAT 포함

ㅇ 예산과목 : 서울시립과학관 전시과, 과학기술 진흥, 전시실 조성 및 운영, 체험강화형 전시실 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

ㅇ 산출내역

통계목	예산액(천원)	세 부 내 역
총 계	83,400
시설비 (401-01)	83,400	∘ 전시물 연계프로그램 운영을 위한 단체체험학습공간 조성 - 공간 디자인 및 시설비, 가구 및 집기 디자인·설치 1식 × 1개소 ∘ 교구·키트 전시공간 및 프로그램 준비 작업 공간 - 공간 디자인 및 시설비, 가구 및 집기 디자인·설치 1식 × 3개소 ∘ 전시물 이동과 전시실 공간 변화에 따른 신규 안내데스크 - 가구 및 집기 디자인·설치 1식 × 2개소

끝.