문서번호	치수과-2936
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	04/12
			이유국
협 조

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

설계변경(총차2회, 2차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

설계변경(총차1회, 2차1회) 검토보고

「2023년 한강 저수로 준설공사」관련 건설사업관리자 설계변경(총차2회, 2차1회) 요청에 따른 조치 계획을 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 저수로 준설공사(장기계속)

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 ~ 신곡수중보

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '24. 5. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 57,105㎥, 반출 73,290톤

**********************************

***************************

********************************

□ 관련문서

ㅇ 2023년 한강 저수로 준설공사(총차2회, 2차1회) 변경 설계서 제출

(이준한강2024-13호, 2024.4.2.)

ㅇ 실정보고서

- 준설토 반출량 및 사토장 변경(치수과-1574호, 2024.2.27)

- 잠원, 뚝섬 선착장 추가 준설(치수과-2316호, 2024.3.22)

□ 변경사유

ㅇ '23년 배정 예산 부족으로 임시야적된 준설토 추가 반출

- 준설토 추가 반출 : 15,872.5톤

ㅇ 수상교통 활성화를 위한 잠원, 뚝섬 선착장 조성 지역 추가 준설

- 추가 준설량 : 14,000㎥(잠원 4,700㎥, 뚝섬 9,300㎥)

********************************************

□ 주요 공종 수량 변경 현황

공 종	규 격	단위	변 경 현 황
			당 초	변 경	증·감
여의하류(서울마리나)	백호준설, L=12.51km	㎥	2,800	14,000	증)	11,200
잠실택시승강장	백호준설, L=29.57km	㎥	1,455	-	감)	1,455
잠원 선착장	백호준설, L=23.55km		-	4,700	증)	4,700
뚝섬 선착장	백호준설, L=27.76km		-	9,300	증)	9,300
사토운반	L=49.9km, D/T 24톤	톤	73,290	43,487.5	감)	29,802.5
	L=53.8km, D/T 24톤	톤	-	42,105	증)	42,105
	L=66.4km, D/T 24톤	톤	-	28,070	증)	28,070

※ 사토장 변경 운반단가 계약단가 적용(계약상대자와 협의 완료)

ㅇ 공사비 증·감 현황

- 총차 2회                                                          (단위 : 원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 ·감
****	*	*************	*************	**	***********
*****	*	***********	***********	**	**********
*****	*	*************	*************	**	***********

- 2차 1회                                                            (단위 : 원)

***	**	***	***	****
****	*	***********	*************	**	***********
*****	*	**********	***********	**	**********
*****	*	***********	*************	**	***********

□ 조치계획

ㅇ 설계변경 관련 규정에 대하여 검토한 결과 적정하게 변경하였다고 판단되어, 상기와 같이 설계변경(총차2회, 2차1회) 시행

- 설계변경 시행 및 변경계약 요청(치수과→총무과)

ㅇ 추가공사 시행에 따른 부족 예산은 '24년 준설예산 사용

붙임 : 1. 변경 내역서 1부

2. 계약금액조정 검증확인서 각 1부

3. 설계변경자문 의견서 각 1부

4. 건설사업관리단 검토의견서 1부

5. 관련 보고서 1부.  끝.