문서번호	시설건설과-3739
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
박윤선		이승우	04/12
			代장기덕
협조

올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사

추진공사 시공계획서 검토 보고

2024. 4.

시  설  부

(시설건설과)

올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사

추진공사 시공계획서 검토결과 보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 박윤선☎1494

「올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사」 시행 중 추진공사 시공계획서 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련문서

ㅇ 시공계획서 검토보고서 제출[서울시설공단 공사감독2처-3144(2024. 4. 12.)호]

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023. 5. 22.~ 2024. 12. 20.

ㅇ 공사개요: D= 300~ 1,000㎜ L=1,888m

ㅇ 도 급 비: 6,378,290,000원

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 공사감독: 서울시설공단 공사감독2처 조남명

□ 보고 내용

ㅇ 추진위치: 파크리오 아파트 120동~201동 앞 하수도 하월구간

ㅇ 감독기관 시공계획 검토 내용: 적정

구 분	검 토 내 용	검토결과
공사 세부공종표	· 공사기간에 따른 작업량 산출의 적정성 · 공정의 순서 및 일정 등 계획의 적정성	적정
시공절차 및 시공방법	· 가설 공종에 대한 도면, 시방서 일치여부 · 가설 공종에 대한 시공절차 및 시공방법 적정성	적정
주요장비, 자재, 인력투입계획	· 예정공정표와 연계하여 장비, 자재, 인력투입 계획 적정성 ※ 건설기계 장비작업계획서 사전검토 완료(04.11)	적정
안전관리계획	· 공사장 주변 통행안전시설의 설치 및 교통소통에 관한 계획 · 안전점검 및 교육계획 수립 여부	적정
현장조사	· 지반상태 등 현장여건 사전조사 여부 - 시험굴착사전완료(04.06.), 지반조사(보링)시 입회 확인 등	적정
구조 및 안전	·가설공사 설치상세도 작성 여부 ·가설공사 구조검토 시행 여부: 설계자 추가 설계	적정
기타의견	************************ ***************************** ************************** **************************** ******************** ******************************************************************************* ******************************* ********* ************************************ ******************************* ************************

□ 검토결과

ㅇ 시공계획서 제출 확인: 승인(적정)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제134조(시공계획 검토·확인)에 의해 시공계획서 변경사항에 대하여 검토됨

- 건설근로자 및 공사장의 안전강화를 위하여 위험성 평가서에 입각한 일일안전교육 실시 및 극단적 상황 시나리오 작업자 공유할 수 있도록 요청

□ 행정사항

ㅇ 추진공사 시공계획 서울시설공단에 승인 통보

붙임  서울시설공단 제출서류 1식.  끝.