문서번호	총무과-4380
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	총무과장	한성백제박물관장
은성필	이지영	박양규	04/16
			김지연
협 조

「백제집자리 유구보호각 증·개축공사」

2025년도 예산신청 보고

2024. 4.

한성백제박물관

(총 무 과)

「백제집자리 유구보호각 증·개축공사」

2025년도 예산신청 보고

백제집자리 유구보호각 증·개축공사의 추진사항을 보고하고 다음과 같이 문화재청 예산신청을 하고자 합니다.

추진 배경

❍ 시설 노후(준공 후 29년 경과)

- 1993년 준공이후 현재까지 시설물의 부분적인 보수만 실시함에 따라 지속적인 누수발생 및 곰팡이 확산 등으로 시설물의 미관을 훼손하고 있어 전면적인 보수 필요

❍ 관람편의시설 부족에 따른 민원발생

- 화장실 및 교육공간 등 관람편의시설이 부족하고, 장애인 접근성이 낮아 잦은 민원이 발생하고 있으므로 관람편의시설 증축 및 보행약자를 위한 진입로 정비 필요

❍ 유구의 역사성, 보존 필요성

- 한성백제시대 집자리 형태가 가장 온전한 서울시 최초 집자리 전시관으로서 역사적 보존가치가 높고, 유네스코 세계문화유산 등재가능성과 연계한 사업진행 필요

추진 근거

❍ 쾌적하고 안전한 관람환경 조성을 위한 한성백제박물관 노후시설 종합정비 계획

[총무과-677, 2020.1.17.]

❍ 백제집자리전시관 보수 및 개선 계획 [총무과-11197, 2020.11.9.]

❍ 백제집자리전시관 유구보호각 정비사업 추진계획 [총무과-2569, 2021.3.11.]

❍ 백제집자리전시관 유구보호각 증·개축공사 기본 및 실시설계 용역 추진계획 [총무과-1568, 2022.2.16.]

❍ 백제집자리전시관 유구보호각 증·개축공사 추진계획 및 예산신청 보고

[총무과-28507, 2022.11.08.]

❍ 백제집자리전시관 유구보호각 증·개축공사 설계용역 준공 검토 보고

[총무과-30350, 2022.12.21.]

❍ 백제집자리전시관 유구보호각 증·개축공사 사업비 변경 및 예산신청 보고

[총무과-4557, 2023.04.21.]

❍ 백제집자리전시관 개편 추진계획 [총무과-2225, 2024.02.23.]

❍ 백제집자리전시관 정비사업부지 발굴조사 계획 [백제학연구소-311, 2024.03.05.]

사업개요

❍ 사 업 명 : 백제집자리전시관 유구보호각 증·개축공사

❍ 총사업비 : 46.7억(국비70%, 시비30%)

- 내용 : 설계비1.5억 + 공사비40억 + 감리비0.7억 + 전시공사비3.4억 + 발굴조사비 0.6억 + 도시계획용역비 0.5억

❍ 연차별 예산

구 분	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
합 계	4,670,200	150,000	-	2,148,000	2,372,200	(단위: 천원) ’22 설계용역 ’24 발굴조사 및 1차년도 공사비
국 비	3,269,140	105,000	-	1,503,600	1,660,540
시 비	1,401,060	45,000	-	644,400	711,660

※ ’24년 예산: 2,148백만원(국비 1,504 / 시비 644)

구 분	합계	공사비	발굴조사비	도시계획 시설용역	감리비	비고
합 계	2,148,000	2,000,250	62,000	50,000	35,750	(단위: 천원)
국 비	1,503,600	1,400,175	43,400	35,000	25,025
시 비	644,400	600,075	18,600	15,000	10,725

※ ’25년 예산계획: 2,372백만원(국비 1,660 / 시비 712)

구 분	합계	공사비	전시공사비	감리비	비고
합 계	2,372,200	1,999,750	336,700	35,750	(단위: 천원)
국 비	1,660,540	1,399,825	235,690	25,025
시 비	711,660	599,925	101,010	10,725

❍ 2025년도 문화재청 신청 사업비 :

- 기 확보 예산(설계용역비, 발굴조사 및 1차년도 공사비)을 제외한 잔여 사업비 신청 필요

- 2차년도 공사비 2,372,200천원

→ 국비: 1,660,540천원, 시비: 711,660천원(국비:시비=7:3)

그간 추진사항

❍ ’20.11.09. : 백제집자리전시관 보수 및 개선계획 수립

❍ ’21.03.10. : 백제집자리 유구보호각 정비사업 추진계획 수립

❍ ’21.04.~ 09. : 백제집자리 유구보호각 정비 및 활용에 대한 기본계획 수립용역 시행 및 자문보고회 운영

❍ ’22.02.16. : 백제집자리 유구보호각 증·개축공사 기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립

❍ ’22.04.28.~12.15. : 기본 및 실시설계용역

- 대표계약자 : (주)연경당건축사사무소 대표 김성은

- 분담계약자 : (주)상송엔지니어링건축사사무소 대표 황장석

❍ ’22.05.12. : 착수보고회 개최

- 기본계획안의 검토 및 자문내용을 충분히 숙지하여 계획설계안이 크게 변경되지 않는 범위 내에서 발전시켜 실시설계 필요

- 유구보호+전시+학습기능을 고려한 설계 필요

❍ ’22.08.09. : 중간보고회 개최

- 철골프레임의 전체적인 Layout을 기존 골조와 조화되는 방식 검토

- 유적 보존을 위한 채광, 통풍 등에 대한 검토 및 방수, 우수처리 상세설계

- 백제집자리 유규에 초점을 맞춘 전시계획 필요

❍ ’22.10.13. : 디자인자문(최종) 보고회 개최

- 지붕 디자인의 경우 솟을지붕 면적 확장을 통한 자연채광 및 자연환기 강화, 유수상부의 환기시설로 유구보호를 위한 공기필터 역할

- 유구상부의 스프링클러 헤드 설치는 지양하되 법적 기준에 따라 설치시 유구보호를 위한 방법으로 설치

- 전시계획과 연계된 건축, 전기설비등의 계획 필요

❍ ’22.11.10 : 송파구 건축경관 심의

❍ ’23.01.13 : 문화재청 설계승인 완료

❍ ’23.06.30 : 송파구 공용건축물 증축허가 협의

❍ ’24.03.05 : 발굴조사 계획 방침 수립(백제학연구소)

❍ ’24.03.22 : 매장문화재 발굴허가(문화재청)

❍ ’24.04월(현재) : 매장문화재 발굴조사 사전절차 진행중(수목/지장물 제거 등)

향후 계획

❍ '24. 4월	: 문화재청 예산요청

❍ '24. 4~7월	: 매장문화재 발굴조사 이행

❍ '24. 7~9월	: 도시계획시설 변경 인가 및 발주 사전절차 이행

❍ '24. 9월	: 공사 발주

붙임  1. 2025년도 문화재보수정비(총액계상)사업신청서 1부.

2. 사업비산출서 1부.  끝.