문서번호	건축부-5994
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
박영우		김선경	04/16
			소영수
협 조

『서울 어울림체육센터 건립공사』

계약 변경(2차 1회) 검토보고

2024. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

계약 변경(2차 1회) 검토보고

「서울 어울림체육센터 건립공사」관련 설계변경 소위원회(소2024-4) 결과를 반영하여 계약 변경을 하고자 검토 후 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치 : 노원구 상계동 1268 (수락산역 환승주차장)

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 14,779㎡(볼링장 32레인, 수영장 10레인 등)

ㅇ 공사기간 : ’22. 7. 25. ~ ’25. 7. 7.

**************************

ㅇ 시공사(코원건설 외1), 감리사(토문엔지니어링건축사사무소 외2), 설계사(자인 건축사사무소 외1)

*****************************************

□ 변경계약 검토내용

ㅇ 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장 계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정

- 설계변경 소위원회 조치결과 보고(어울림 제2403-048호, 2024.03.18.)

- 설계변경 소위원회 결과에 따른 공사계약 변경요청(토문 제2024-0655호, 2024.04.11.)

ㅇ 변경내용 및 사유

- 변경 사유 : 토목공사 발파암 처리방안 등 6건 실정보고 반영

- 공사기간 변경

****	****	****	****
**	*********************** *******	*********************** *******	*****
**	*********************** ******	*********************** ******	*****

- 공사금액 변경

****	****	****	****
**	***************	***************	**************
**	**************	**************	****

********************************************************************

ㅇ 특이사항

**********************************************************************

*****************************************

□ 검토의견

ㅇ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 설계변경 소위원회(소2024-4) 개최결과에 따라 조치완료하였으며,
시공사에서 제출한 공기연장 및 증액에 대한 사유가 적정함

ㅇ 공사관리관 검토의견

- 책임건설사업관리기술자 검토의견이 적정하며, 계약부서로 통보하여
변경계약을 추진하고자 함

붙임: 1. 설계변경 소위원회 조치결과 보고. 1부.

2. 소위원회 결과에 따른 공사계약 변경요청 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.