아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무갖기공사 준공기한 연기 요청

1. 환경녹지과-7634호(2023.10.25.)「2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무 갖기 공사 시행」및 같은 부서-1786호(2024.4.17.)「2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무 갖기 공사 준공기한 연기 검토보고」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 센터 2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무 갖기 공사에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무 갖기 공사

나. 공사개요

○ 공사기간 : 2023. 11. 16. ~ 2024. 04. 30.

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동 1538번지외 1개소

○ 공사내용 : 느티나무외 5종 50주, 황금사철외 9종 3,370주, 보행매트 108m

**********************

**********************************************

**************

******	*****	*****	****
****	*************	*************

*******

**************************************************************************************************************************************************

******************

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	환 경 녹 지 과 장
주무관	정동열		환경관리팀장	윤희권		환경녹지과장	전결 04/17
강병기
협조자	재무팀장	전선훈
시행	환경녹지과-1800	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60, 서부공원여가센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-5538	/전송	02-300-5527	/	jdy1025@seoul.go.kr	/	부분공개(5)