문서번호	정수시설과-4373
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박상현		김영준	04/17
			전종원
협조
	주무관		박소현

2023년 건축·토목시설물 정비공사(연간단가)

설계변경(최종) 시행 보고

2024. 4.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 건축·토목시설물 정비공사(연간단가)

설계변경(최종) 시행 보고

우리정수센터와 계약한 2023년 건축·토목 시설물 정비공사(연간단가)와 관련 신규공종 및 물량증·감 사항이 발생되어 설계변경(최종)을 시행하고자 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명: 영등포아리수정수센터 건축·토목 시설물 정비공사

□ 공사기간: 2023. 5. 2. ~ 2024. 4. 30.

ㅇ 1차수: 2023.  5.  2. ~ 2023. 12. 31.

ㅇ 2차수: 2024.  1.  1. ~ 2024.  4. 30.

□ 계약업체: *************

□ 계약금액: 금****************************

ㅇ 1차수: 금**************************

ㅇ 2차수: 금****************************

□ 공사규모: 콘크리트포장절단(39m) 외 193개 공종

2		설계변경 현황

□ 설계변경 사유: 물량 증·감 및 신규공종 발생

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

□ 설계변경에 따른 금액변경

				(단위 : 원)
구 분		당 초	변 경	증 · 감		비고
총공사비		***********	***********	감	******
도 급 비	공급가액	***********	***********	감	******
	부가세	**********	**********	감	*****
	계	***********	***********	감	******

구 분		당 초	변 경	증 · 감		비고
총공사비		***********	***********	감	******
도급비	1차수	***********	***********	******
	2차수	**********	**********	감	******

□ 설계변경 주요 공종

ㅇ 시공물량 증·감: 고압블록포장 외 28개 공종

공 종	명 칭	단위	수 량		증·감		비고
			당초	변경
토 공	고압블록포장	a	-	1.13	증	1.13
시설물공	바탕처리	㎡	-	43.97	증	43.97
사급자재	스테인레스평철	kg	98	40.33	감	57.67
시설물공	코크리트균열보수	m	262	-	감	262

ㅇ 신규공종: 경계석철거 외 8개 공종

공 종	명 칭	단위	수 량		증·감		비고
			당초	변경
시설물공	경계석철거	개	-	1	증	1
시설물공	철재철거	㎡	-	0.15	증	0.15
사급자재	캐미컬 앵카	개	-	36	증	36
사급자재	스텐레스파이프(SUS304)	m	-	55.72	증	55.72

□ 설계변경 단가적용 기준

ㅇ 물량 증·감 공종:  계약단가 적용

ㅇ 신규공종: 산출단가에 계약 낙찰율 적용

□ 예산과목

ㅇ 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수비, 토목건축시설물유지관리)

ㅇ 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(원수 및 취수비, 토목건축시설물유지관리)

3		조치 및 향후계획

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 사항으로 심의위원회 개최를 통해 적정성 여부를 심의하고 그 결과를 설계변경에 반영하여 계약 및 정산 시행코자 함.

□ 향후계획

ㅇ 2024. 4. 18. : 설계변경 심의위원회 개최

ㅇ 2024. 4. 23. : 설계변경에 따른 계약 의뢰

ㅇ 2024. 4. 25. : 준공 및 정산 시행

붙 임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정검증시스템 검증확인서 1부.  끝.