문서번호	시설관리과-6604
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박민용	김용섭	전결 04/17
		권승계
협 조

『2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

사토장 변경 검토보고

2024. 4.

서부수도사업소

[시설관리과]

『2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

사토장 변경 검토보고

『2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』와 관련하여 ㈜천일 및 시공사가 제출한 사토장 변경 신청에 대한 검토 내용임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2023년 은평구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요 : 노후밸브 및 밸브실 정비 125개소, 배수지 환경정비

○ 계약금액 : 금794,138,800원

○ 공사기간 : 2023. 6. 20. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약업체 : ㈜신이앤씨 대표 신승복

○ 공사감리 : ㈜천일 건설사업관리기술자 김경중

Ⅱ		실정보고내용

○ 당초 현장 발생 잔토를 수도권매립지관리공사가 관리하는 매립지로 반입·처리코자 하였으나, 반입 부적합 판정을 받아 사토장 변경이 필요한 실정임.

토사 반입불가 회신 공문	토사 반입 사진

○ 변경 사토장

구 분	당 초	변 경	비 고
위 치	수도권매립지	김포시 월곶면 김포대로 2918번길 88-7
잔 토 처리비	18,309원/㎥	변경없음

Ⅲ		검토내용

○ 변경 사토장 선정 기준

- 사토장으로 사용 가능한 부지(면적) 및 진·출입로 확보여부

- 비산먼지 발생사업 신고 수리 여부

- 반입동의 절차 이행 가능 여부

○ 상기 기준을 만족하므로, 변경 사토장으로 승인하고자 함.

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같이 사토장을 변경토록 승인하고 설계변경시 정산 반영코자 함.

붙임  사토장 변경신청서 1부.  끝.