문서번호	정수시설과-4432
결재일자	2024. 4. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박상현		김영준	04/18
			전종원
협조

2023년 건축·토목시설물 정비공사

설계변경(최종) 심의결과 보고

2024. 4.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 건축·토목시설물 정비공사

설계변경(최종) 심의결과 보고

정수시설과장 :김영준☎3146-5670 담당 : 박상현☎5680

2023년 영등포아리수정수센터 건축·토목시설물 정비공사(연간단가)와 관련 신규공종 및 물량증감 사항이 발생 되어 설계변경(최종) 심의를 개최하고 결과를 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명: 영등포아리수정수센터 건축·토목시설물 정비공사

□ 공사기간: ***********************

ㅇ ****************************

ㅇ ****************************

□ 계약업체: ***************

□ 계약금액: *****************************

ㅇ 1차수: ***************************

ㅇ 2차수: *****************************

2		심의회 개최

□ 심 의 일: 2024년 4월 18일(목) 09:30~10:00

□ 심의장소: 관리본관 2층 소회의실

□ 위 원 장: 정수시설과장  김영준

□ 심의위원: 시설6급 주은선 외 3명, 간사 1명

□ 심의안건

ㅇ 설계변경 타당성 및 제경비 요율적용 적정성 여부

ㅇ 시공물량 증·감 발생 및 대가 적용 적정성 여부

ㅇ 신규공종 발생 및 대가 적용 적정성 여부

3		설계변경 현황

□ 설계변경 사유: 시공물량 증·감 및 신규공종 발생 등

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

□ 설계변경 금액변경

				(단위 : 원)
구 분		당 초	변 경	증·감		비고
총공사비		***********	***********	감	******
도 급 비	공급가액	***********	***********	감	******
	부가세	**********	**********	감	*****
	계	***********	***********	감	******

구 분		당 초	변 경	증·감		비고
총공사비		***********	***********	감	******
도급비	1차수	***********	***********	변경사항없음
	2차수	**********	**********	감	******

□ 설계변경 주요 공종

ㅇ 시공물량 증·감: 고압블록포장 외 28개 공종

공 종	명 칭	단위	수 량		증·감		비고
			당 초	변 경
토 공	고압블록포장	a	-	1.13	증	1.13
시설물공	바탕처리	㎡	-	43.97	증	43.97
사급자재	스테인레스평철	kg	98	40.33	감	57.67
시설물공	코크리트균열보수	m	262	-	감	262

ㅇ 신규공종: 경계석철거 외 8개 공종

공 종	명 칭	단위	수 량		증·감		비고
			당 초	변 경
시설물공	경계석철거	개	-	1	증	1
시설물공	철재철거	㎡	-	0.15	증	0.15
사급자재	캐미컬 앵카	개	-	36	증	36
사급자재	스텐레스파이프(SUS304)	m	-	55.72	증	55.72

□ 설계변경 단가적용

ㅇ 물량 증·감 공종:  계약단가 적용

ㅇ 신규공종: 산출단가에 계약 낙찰율을 적용

□ 예산과목

ㅇ 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수비, 토목건축시설물유지관리)

ㅇ 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(원수 및 취수비, 토목건축시설물유지관리)

4		심의결과

□ 설계변경 타당성 및 제경비 산정 및 요율적용 적정성 여부 : 적정

□ 시공물량 증·감 발생 및 대가 적용 적정성 여부     : 적정

□ 신규공종 발생 및 대가 적용 적정성 여부           : 적정

5		조치의견

□ 위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 변경 사항에 대하여 심의위원회 결과를 반영하여 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부.

3. 심의위원회 의견서 1부.  끝.