문서번호	설비부-6986
결재일자	2024. 4. 18.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
정성호		곽용길	04/18
			신용휴
협 조

『당산역 도시고속도로 환승정류장 신설공사』

관급자재(엘리베이터) 납품기한 연기 검토 보고

2024. 4.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『당산역 도시고속도로 환승정류장 신설공사』

관급자재(엘리베이터) 납품기한 연기 검토 보고

「당산역 도시고속도로 환승정류장 신설공사」와 관련하여 건설사업관리단으로부터 접수된 엘리베이터 납품기한 연기 건을 검토하고 보고 드림

□ 공사현황

ㅇ 사 업 명 : 당산역 도시고속도로 환승정류장 신설공사

ㅇ 사업기간 : 2022.12.29. ~ 2024.6.30. (당초 2024.4.30.에서 연장)

ㅇ 감 리 단 : (주)동해종합기술공사

□ 관련근거

ㅇ 엘리베이터 납품 기한연장 요청검토 보고(당산감 제24-188호, 2024.4.17.)

ㅇ 물품 다수공급자 계약특수조건 제26조(납품기한의 변경)

□ 변경사항

ㅇ 변경내용 : 공사기간 연장으로 인한 납품기한 연기

ㅇ 사    유 : 납품(현장투입) 시기 미도래

품 목 (계약상대자)	납품요구번호 (계약번호)	계약금액 (조달수수료포함)	계약방법	납품기한
				변경 전	변경후
******** *********	**************** *****************	***********	**** *******	**********	**********

□ 검토의견

ㅇ 감리단)  공사일정 검토결과, 해당 관급자재 투입시기 미도래

ㅇ 보고자)  감리단이 제출한 연기 검토내용이 적정한 것으로 판단되어,  계약부서에 의뢰하여 납품기한을 연기하고자 함

붙임 : 감리단 검토공문 1부.  끝.