문서번호	도로과-9093
결재일자	2024. 4. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		도로조명팀장	도로과장		건설교통국장
서재관		이민원	윤득근		04/18
					이상용
협 조						재무과장		이성수
						계약심사팀장		강연경
						스마트통신팀장		이웅기
						조경팀장		이상철
	기획경제국장			장병조		계약팀장		심은진

	포용적 도시 성장, 스마트 그린도시 강동

상암로 노후 가로등 개량공사 시행계획

	공 사 개 요
○ 공 사 명: 상암로 노후 가로등 개량공사 ○ 기 간: 착공일 ~ 2024. 8. 31. ○ 위 치: 상암로(동남로~천호대로 간), 연장 1.1km ○ 규 모: 가로등주 43본, LED등기구 97개, 배관배선 1.1km 등 교체 ○ 계약방법: 공사[제한경쟁입찰(서울)], 관급자재(조달구매) ○ 소요예산: ************** - ******************************************

2024. 4. 17.(수)

건설교통국

(도로과)

사전 검토사항

☞ 해당사항에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	■ 검토 완료(법규명: 도로법, 전기공사업법, 전기안전관리법, 인공조명에 의한 빛공해 방지법)	□ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 ■ 시비 □ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	□ 비 예 산
주민의견 반영 및 참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 기타( )	■ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
전문가 자문		□ 이행 완료 □ 예정 (이행방안: )	■ 해당 없음
협업 협치	타 기관 및 단체	□ 중앙부처 ■ 서울시 □ 타 지자체 □ 투자출연기관 □ 민간단체 □ 구의원 업무공유 □ 기타( )	□ 해당 없음
	관 련 부 서	□ 협업 필요(해당부서: 스마트도시과, 동부도로사업소)	□ 해당 없음
추진절차		□ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 민간투자사업 심의 □ 타당성 검토 □ 공유재산 심의 □ 의회 심의 □ 기타 위원회 심의 등	■ 해당 없음
홍보방안		□ 보도자료 제공 □ 기자 설명회 □ 구 소식지 □ SNS □ 기타( )	■ 해당 없음
기타 고려사항		□ 인권영향평가(구민 인권보장 및 증진) □ 아동친화 및 아동영향평가 □ 교육영향평가(학생 안전과 수업권 확보) □ 여성친화 및 성별영향 □ 건강친화요소 □ 환경인지 □ 사회적 약자 배려 □ 타 기관 사례 파악 비교 □ 안전대책 □ 유지관리비용 □ 시장조사 □ 미래행정 수요예측 □ 고용효과 □ 행사의전 ■ 바른 우리말(행정순화어)

상암로 노후 가로등 개량공사 시행계획

내구연한(8년)이 경과된 상암로 상 가로등 시설물(설치연도 2004년)을 개량하여 안전하고 쾌적한 도로 교통환경을 조성하고자 함

1		추진근거

○ 2024년 도로조명시설 유지관리 계획(도로과-2313: 2024. 1. 30.)

○ 2024년도 도로조명시설 개량사업 추진 계획 통보

(서울시 도로시설과-859: 2024. 1. 16.)

2		공사개요

○ 공 사 명: 상암로 노후 가로등 개량공사

○ 기    간: 착공일 ~ 2024. 8. 31.

○ 위    치: 상암로(동남로~천호대로 간)

○ 규    모: 가로등주 43본, LED등 97개, 배관배선 1.1km 등 설치

○ 소요예산: **************

- ******************************************

3		세부추진계획

○ 계약방법

- 공    사: 제한경쟁입찰(서울지역)

- 관급자재: 조달청 다수공급자계약 물품 구입

- 도로굴착복구비: 고지서 납부

○ 공사내용

- 가로등주 43본 설치 및 철거

- LED등기구 97개(차도등 52개, 보행등 45개) 설치

- 배관배선(가로등용, 통신용, 상시전원) 1.1km 매설

- 통합지주 2본(LED등 우리구, 지주 및 신호등 동부도로사업소) 설치

○ 추진일정

- 2024. 4.    : 일상감사 요청(감사담당관) 및 공사발주

- 2024. 5.     : 공사계약 및 착공

- 2024. 8. 31. : 공사준공

4		예산사항

○ 예산금액: *************

○ 예산과목: 재난안전관리실 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 노후 도로조명시설 개량사업, 시설비(401-01)

5		기대효과

○ 쾌적한 도로 교통환경 개선

○ 에너지 절약(전기요금 기존 대비 50% 절감)

6		행정사항

○ 스마트도시과: 스마트용 설비(통신용 계량기, 배관, 맨홀) 유지관리 이관

○ 푸른도시과: 가로등 공사를 위한 관목 및 초목 이식 협의

붙임  1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 공사설계서 1부.  끝.