문서번호	기전설비과-3533
결재일자	2024. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임광수		윤양호	04/19
			어용선
협 조

장기사용 송배수관 정비(동부 16구간) 전기공사

실정보고(4차) 검토결과

2024. 4. 18. (목)

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

장기사용 송배수관 정비(동부 16구간) 전기공사

실정보고(4차) 검토결과

생산부장 :어용선☎3146-1301 기전설비과장 : 윤양호☎1330 담당 : 임광수☎1336

「장기사용 송배수관 정비(동부 16구간) 전기공사」관련 실정보고(4차) 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 장기사용 송배수관 정비(동부 16구간) 전기공사

*************************************

*****************

ㅇ 공사내용 : 임시전력 및 부대설비(동력배관‧배선, 접지‧피뢰설비 등) 공사

□ 검토내용

ㅇ 실정보고 내용 및 사유

****	*****	*********	*************
*	******	***************************************************	************
*	******
*	******	**************************************	***********
	****	*
****************			************

ㅇ 관련근거

- 책임건설사업관리단 주양(동부16구간)2024-002(2024. 4. 16.)호

‘장기사용 송배수관 정비(동부 16구간) 전기공사’제4회 실정 보고

***********

*******

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 검토결과

ㅇ 변경사유가 발주처 선행공정(토목) 변경 등에 따른 것으로 적정함.

ㅇ 추후 제경비(보험료, 산업안전보건관리비 등) 및 고용개선지원비(PS단가) 정산과 병행하여 설계변경 및 준공정산 시행하고자 함.

□ 향후계획

ㅇ '24. 4. : 실정보고 승인 통보(감리단, 시공사)

ㅇ ‘24. 5. : 준공정산 및 변경계약 의뢰

붙임 : 실정보고서(4차) 1부.  끝.