문서번호	정수시설과-4462
결재일자	2024. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박상현		김영준	04/19
			代김성수
협조
	주무관		박소현

2023년 건축토목시설물 정비공사 관련

재해예방 기술지도 용역 설계변경 보고

2024.  4.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 건축토목시설물 정비공사 관련

재해예방 기술지도 용역 설계변경 보고

정수시설과장 :김영준☎3146-5670 담당 : 박상현☎5680

2023년 건축·토목시설물 정비공사 재해예방 기술지도 용역과 관련하여 물량증감 사항이 발생 되어 설계변경을 시행하고자 보고 드림.

1		공사개요

□ 용 역 명: 재해예방 기술지도 용역

□ 용역기간: ***********************

ㅇ 1차수: *************************

ㅇ 2차수: *************************

□ 계약업체: ***************

□ 계약금액: 금**************************

ㅇ 1차수: 금************************

ㅇ 2차수: 금**************************

2		설계변경 현황

□ 설계변경 사유: 물량증감 발생

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

□ 설계변경에 따른 금액변경

구 분		당 초	변 경	증 · 감		비고
총공사비		*********	*********	감	*********
도 급 비	공급가액	*********	*********	감	*********
	부가세	*******	*******	감	*******
	계	*********	*********	감	*********

구 분		당 초	변 경	증 · 감		비고
총공사비		*********	*********	감	*********
도급비	1차수	*********	*********	변동사항없음
	2차수	*********	*********	감	*********

□ 설계변경 주요 공종

ㅇ 시공물량 증·감 사항: 재해예방 기술지도 차수별 변동

공 종 명	단위	차수별	당초	변경	증·감		비고
재해예방 기술지도	회	총 차	**	**	감	*
		1 차 수	**	**	변동없음
		2 차 수	**	*	감	*

□ 설계변경 단가적용 기준

ㅇ 물량 증·감 공종:  계약단가 적용

□ 예산과목

ㅇ 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수비, 토목건축시설물유지관리)

3		조치 및 향후계획

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 사항으로 심의위원회 개최를 통해 적정성 여부를 심의하고 그 결과를 설계변경에 반영하여 계약 및 정산 시행코자 함.

□ 향후계획

ㅇ 2024. 4. 22. : 설계변경 심의위원회 개최

ㅇ 2024. 4. 23. : 설계변경에 따른 계약 의뢰

ㅇ 2024. 4. 25. : 준공 및 정산 시행

붙 임  설계변경내역서 1부. 끝.