문서번호	건축부-6255
결재일자	2024. 4. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화시설과장	건축부장
박영우	김선경	04/22
		소영수

『서울 어울림체육센터 건립공사』 구조체 콘크리트 타설 실정보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』

구조체 콘크리트 타설 변경 실정보고

2024.  4.

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

구조체 콘크리트 타설 변경 실정보고

구조체 콘크리트 타설 변경 실정보고가 책임건설사업관리기술인으로부터 제출되어 적정 여부를 검토하여 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡
(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ 계약금액: 금 26,535,221천원(2차: 금 3,322,014,940원)

ㅇ 공사기간: ’22. 7. 25. ~ ’25. 7. 7.(36개월)
(2차: ’23. 9. 18. ~ ’24. 4. 16.)

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 률: 33.8%

□ 추진경위

ㅇ ’19. 12. ~ ’21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ ’22. 07. 29.   : 공사 계약

ㅇ ’22. 07. 25.   : 공사 착공 (건축, 토목, 조경)

ㅇ ’22. 08. 23.   : 착공식

ㅇ ’23. 09. 18.   : 1차수 공사 완료

ㅇ ’24. 04. 현재  : 매트기초콘크리트 타설중

□ 실정보고 내용

ㅇ 관련근거 등

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약일반조건 제6절(공사설계 변경)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 자인 DVA-240312 콘크리트 분리타설 및 지수판 추가 설계사 검토

- 코원어울림-제2024-03-11호 콘크리트 타설규격 변경 및 지수판 추가반영요청

ㅇ 변경 내용

****************************

***************************************

****************************

********************************

ㅇ 변경사유

*******************************************

**********************************************************************************

********************************************************************************

*********************************************

*****************************************************************************

*********************************************

ㅇ 공사비 변경 검토

****	****	****	*******	**
*****	************	************	***********************	******
*****	***********	************	***********************
****	************	************	************************
*****	***********	***********	***********************
********	************	************	***********************

ㅇ 책임건설사업관리기술인 의견

- 현장여건 상이에 의한 구조체 콘크리트 타설 변경 실정보고 검토한 결과, 변경함이 적정함

□ 적정여부 검토

ㅇ 설계변경 대상이며, 원활한 공정관리를 위하여 선시공 후, 관련 절차 이행시 최종 공사물량 및 금액을 확정하고자 함

붙임: 콘크리트 타설방법 변경 실정보고 재검토 1부.  끝.