문서번호	공원녹지과-6517
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		생태하천팀장		공원녹지과장		도시관리국장
박혜선		이덕신		김기배		04/23
						임창섭
협조
	재무과장		나재진
	계약팀장		유보현

청계천 생태복원 및 녹화사업(4차) 실정사항 및 설계변경 검토보고

- 청계천 생태복원 및 녹화사업(4차) -

실정사항 및 설계변경 검토보고

2024. 4.

[공원녹지과]

- 청계천 생태복원 및 녹화사업(4차) -

실정사항 및 설계변경(정산) 검토보고

「청계천 생태복원 및 녹화사업(4차)」추진 관련 현장여건 및 실정사항을 반영하여 설계변경(정산)을 아래와 같이 추진하고자 함.

□ 사업개요

ㅇ 대 상 지: 청계천(마장동 802-2 일대)

ㅇ 공사기간: 2023. 12. 20. ~ 2024. 4. 30.

ㅇ 공사내용: 식재기반 조성, 장미 식재 등

ㅇ 공 사 비: 284,596,260원(시비, 사고이월)

ㅇ 도 급 자: ㈜천일조경(대표 이홍연)

ㅇ 재해예방 기술지도: ㈜바른안전기술(대표 황천근)

□ 검토내용

ㅇ [도급] 주요 실정사항 및 변경내용

구 분	실정사항	변경내용		증감액(천원)
식재공	‣ 대상지 일부 변경으로 인한 식재 및 이식 물량 변경 ‣ 현장민원 반영 사면부 사초류 식재 추가 및 개나리 전정	‣ 사계장미(H0.35x2~3가지x2년생) ‣ 관목이식(H0.3~0.7m) ‣ 맥문동매트(340x500x40) ‣ 우드칩깔기(T30) ‣ 억새(모닝나이트, 6치포트) ‣ 털수염풀(6치포트) ‣ 배롱나무(핑크벨벳 H0.5xW0.4) ‣ 목수국(라임나이트) ‣ 개나리 전정(H0.9m 이상)	11,680주 → 11,192주 880주 → 1200주 106㎡ → 83㎡ 1,257㎡ → 1,176㎡ 0주 → 350주 0주 → 400주 0주 → 100주 0주 → 150주 0주 → 1,040주	증20,304
철거공	‣ 대상지 일부 변경으로 인한 물량 변경	‣ 판석포장 철거 19㎡ → 0㎡ ‣ 풀베기 658㎡ → 427㎡ ‣ 관목제거(H0.6) 1,560주 → 1,440주		△214
부대공	‣ 기반조성 면적 변동 ‣ 폐기물 물량 변동	‣ 식생기반(T400) 1,363㎡ → 1,372㎡ ‣ 건설폐재류 운반 1.9ton → 0.0ton ‣ 혼합폐기물 운반·처리 16.634ton → 11.025ton		△325
관급 자재	‣ 대상지 일부 변경으로 인한 식재물량 변경	‣ 사계장미(H0.35x2~3가지x2년생) 11,680주 → 11,192주 ‣ 맥문동매트(340x500x40) 580장 → 458장		△6,449
제경비	‣ 공사비 변동 및 미사용 보험료 정산 등에 따른 제경비 조정			증238

※ 서울시설공단 일부 대상지 제외 요청으로 사업 대상지 변경 시행(서울시설공단 청계천관리처-1566(2024. 3. 7.)호 「공사시행 관련 사항 안내 및 제반사항 준수 요청」)

ㅇ 공사비 변경 예정액

구 분		공 사 비(원)				비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		262,853,490	276,406,990	증	13,553,500
도급비	소 계	122,099,000	142,101,440	증	20,002,440
	공급가액	110,999,091	129,183,128	증	18,184,037
	부 가 세	11,099,909	12,918,312	증	1,818,403
관급자재비		140,754,490	134,305,550	△	6,448,940

ㅇ [재해예방 기술지도] 주요 실정사항 및 변경내용

구 분	실정사항	변경내용	증 감
기 술 지 도	▸ 실제 공사기간 변경에 따른 기술지도 횟수 조정	▸ 기술지도 4회 → 2회	△ 2회

※ 산업안전보건법 시행령 [별표18] 건설재해예방전문기관의 지도 기준

- 기술지도 횟수: 공사시작 후 15일 이내마다 1회 실시

ㅇ 용역비 변경 예정액

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공급가액	720,000	360,000	△ 360,000
	부 가 세	72,000	36,000	△ 36,000
	합 계	796,000	396,000	△ 396,000

□ 예산활용계획

예산현액	지출원인행위액	집행잔액 및 낙찰차액	비 고
284,596,260	257,196,540	27,399,720

ㅇ 예산 집행잔액 및 낙찰차액 사용

- 예산과목: 공원녹지과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계 복원, 하천생태 복원 및 녹화, 시설비및부대비, 시설비(시비 사고이월, 401-01)

(단위: 원)

□ 검토의견

ㅇ 위 사항을 반영하여 감사담당관에 심사 요청 후 결과에 따라 설계변경 추진하고자 하며,

ㅇ 재해예방 기술지도용역은 실제 실시한 기술지도 횟수를 반영하여 변경 계약 후 완수 처리하고자 함.

붙임  1. 변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.