시설물공사 준공 연기 보고(작업지시 54~101)

주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
이준범	代정석균	04/24
		代강무진
협 조

문서번호 :	급수운영과-8124

2023년 성동구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 감독업무 수행 중 준공기간 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2024. 4. 24.

보고자: 직  지방시설주사보  성명 이준범

□ 공사현황

○ 공사명: 2023년 성동구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사-2차
○ 도급자: **************
○ 공사현황

구 분	위 치	공사기간	비고
1	****************	***********************

□ 연기요청사유

○ 야간작업 협의 및 도로굴착 협의 관련 소요일정에 따른 연기

□ 검토결과

○ 상기와 같은 사유로 시설물공사 준공기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

구 분	위 치	당초 공사기간	변경 공사기간
1	****************	***********************	***********************

□ 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 시설물공사 연기원 1부.

2. 작업지시서(54~101) 1부.  끝.