문서번호	정수시설과-4628
결재일자	2024. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정연준		代전준원	04/24
			전종원
협 조
	주무관			박소현

풍납취수장 환경개선공사

재해예방 기술지도 용역 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 환경개선공사

재해예방 기술지도 용역 설계변경 보고

소장:전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :정연준☎5673

풍납취수장 환경개선공사 재해예방 기술지도 용역과 관련 물량증감 사항이 발생되어 설계변경을 시행하고자 보고 드림

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 풍납취수장 환경개선공사 재해예방 기술지도 용역

□ 용역기간 : 2023. 11. 1. ~ 2024. 4. 28.

◦ 1차수 : 2023. 11. 1. ~ 2023. 12. 31.

◦ 2차수 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 4. 28.

□ 계약업체 : 한국종합안전(주) 대표 ***

□ 계약금액 : ***********************

◦ 1차수 : ***********************

◦ 2차수 : ***************************

Ⅱ		설계변경 현황

□ 설계변경 사유 : 시공물량 증감

□ 관련근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

□ 설계변경 내용

◦ 시공물량 조정

(단위 : 회)

구 분	당 초	변 경	증․감
계	12	10	감	2
1차수	4	4		-
2차수	8	6	감	2

◦ 동절기 휴지기간(1월) 재해예방 기술지도 용역 미시행(2회)

□ 설계변경에 따른 금액변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총용역비		*********	*********	*	*******
도급비	공급가액	*********	*********	*	*******
	부가세	*******	*******	*	******
	계	*********	*********	*	*******

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총용역비		*********	*********	*	*******
도급비	1차수	*******	*******		*
	2차수	*********	*********	*	*******

□ 설계변경 단가적용 기준

◦ 물량 증·감 공종 : 계약단가 적용

□ 예산과목

◦ 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설정비, 시설비및부대비, 시설비(건물)

Ⅲ		향후계획

□ 조치계획

◦ 상기와 같은 사항으로 심의위원회 개최를 통해 적정성 여부를 심의하고 그 결과를 설계변경에 반영하여 계약 및 정산 시행코자 함

□ 향후계획

◦ 2024. 4. 24. : 설계변경 심의위원회 개최

◦ 2024. 4. 24. : 변경계약의뢰

◦ 2024. 4. 26. : 준공 및 정산시행

붙임: 1. 설계변경내역서 1부.  끝.