문서번호	정수시설과-4684
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정연준		代전준원	04/25
			代김성수
협 조
	주무관			박소현

풍납취수장 환경개선공사

설계변경(최종) 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 환경개선공사

설계변경(최종) 시행 보고

소장:전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :정연준☎5673

우리정수센터와 계약한 풍납취수장 환경개선공사와 관련 신규공종 및 물량증․감 사항이 발생되어 설계변경(최종)을 시행하고자 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 풍납취수장 환경개선공사

□ 공사기간 : 2023. 11. 1. ~ 2024. 4. 28.

◦ 1차수 : 2023. 11. 1. ~ 2023. 12. 31.

◦ 2차수 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 4. 28.

□ 계약업체 : 삼부건설(주) 대표 *** 외1개사

□ 계약금액 : *******************************

◦ 1차수 : *******************************

◦ 2차수 : *****************************

Ⅱ		설계변경 현황

□ 설계변경 사유 : 물량 증․감 및 신규공종 발생

□ 관련근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

□ 설계변경에 따른 금액변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총공사비		***********	***********	*	**********
도급비	공급가액	***********	***********	*	**********
	부가세	**********	**********	*	*********
	계	***********	***********	*	**********

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총공사비		***********	***********	*	**********
도급비	1차수	***********	***********		*
	2차수	***********	***********	*	**********

□ 설계변경 내용

ㅇ 시공물량 증·감: 시스템비게 설치 및 해체 등

공 종	명 칭	단위	수 량		증·감		비고
			당초	변경
가설공사	시스템비계설치 및 해체	m2	1,882	2,173	증	291
철거공사	경량천장철골틀 해제	m2	148	392	증	244
장비설치공사	배기휀	식	3	0	감	3
공통가설공사	조립식가설울타리	m	201	0	감	201

ㅇ 신규공종: 급배수배관 설치

공 종	명 칭	단위	수 량		증·감		비고
			당초	변경
임시사무실	급배수배관 설치	식	-	1	증	1

□ 설계변경 단가적용 기준

◦ 물량 증·감 공종 : 계약단가 적용

◦ 신규공종 : 산출단가에 낙찰율 적용

□ 예산과목

◦ 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설정비, 시설비및부대비, 시설비(건물)

Ⅲ		향후계획

□ 조치계획

◦ 상기와 같은 사항으로 심의위원회 개최를 통해 적정성 여부를 심의하고 그 결과를 설계변경에 반영하여 계약 및 정산 시행코자 함

□ 향후계획

◦ 2024. 4. 25. : 설계변경 심의위원회 개최

◦ 2024. 4. 25. : 변경계약의뢰

◦ 2024. 4. 28. : 준공 및 정산시행

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정검증시스템 검증확인서 1부.  끝.