문서번호	정수시설과-4689
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정연준		代전준원	04/25
			代김성수
협 조

풍납취수장 환경개선공사

설계변경(최종) 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 환경개선공사

설계변경(최종) 심의결과 보고

소장:전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :정연준☎5673

풍납취수장 환경개선공사와 관련 신규공종 및 물량증감 사항이 발생되어 설계변경(최종) 심의를 개최하고 결과를 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 풍납취수장 환경개선공사

□ 공사기간 : 2023. 11. 1. ~ 2024. 4. 28.

◦ 1차수 : 2023. 11. 1. ~ 2023. 12. 31.

◦ 2차수 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 4. 28.

□ 계약업체 : 삼부건설(주) 대표 *** 외 1개사

□ 계약금액 : *******************************

◦ 1차수 : *******************************

◦ 2차수 : *****************************

2		심의회 개최

□ 심 의 일 : 2024년 4월 25일(목) 15:00~15:30

□ 심의장소 : 관리본관 2층 소회의실

□ 위 원 장 : 정수시설과장 김영준

□ 심의위원 : 시설6급 주은선 외 3명, 간사 1명

□ 심의안건

◦ 설계변경 타당성 및 제경비 요율적용 적정성 여부

◦ 시공물량 증감 발생 및 대가 적용 적정성 여부

◦ 신규공종 발생 및 대가 적용 적정성 여부

3		설계변경 현황

□ 설계변경 사유 : 시공물량 증감 및 신규공종 발생 등

□ 관련근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

□ 설계변경에 따른 금액변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총공사비		***********	***********	*	**********
도급비	공급가액	***********	***********	*	**********
	부가세	**********	**********	*	*********
	계	***********	***********	*	**********

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총공사비		***********	***********	*	**********
도급비	1차수	***********	***********		*
	2차수	***********	***********	*	**********

□ 설계변경 단가적용

◦ 물량 증·감 공종 : 계약단가 적용

◦ 신규공종 : 산출단가에 낙찰률 적용

□ 예산과목

◦ 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설정비, 시설비및부대비, 시설비(건물)

4		심의결과

□ 설계변경 타당성, 제경비 산정 정및 요율적용 적정성 여부 : 적정

□ 시공물량 증감 발생 및 대가 적용 적정성 여부 : 적정

□ 신규공종 발생 및 대가 적용 적정성 여부 : 적정

5		조치의견

□ 위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 변경 사항에 대하여 심의위원회 결과를 반영하여 설계변경 시행코자 함

붙임: 1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부.

3. 심의위원회 의견서 1부. 끝.