문서번호	토목과-5857
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
김종찬		김종천		성규상		04/25
						신용철
협조

준공기한 연기 검토 보고(금호동1가 636번지 공영주차장 건립 소방공사 외 2)

- 금호동1가 636번지 공영주차장 건립 소방공사 - 준공기한 연기 검토 보고

2024. 4.

(토목과)

- 금호동1가 636번지 공영주차장 건립 소방공사 -

준공기한 연기 검토 보고

우리 구에서 시행 중인「금호동1가 636번지 공영주차장 건립 소방공사」와 관련하여 유관기관 협의 등으로 인한 추가 기간이 소요되어 해당 소방공사, 소방감리 및 기술지도 용역의 준공기한을 연기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 금호동1가 636번지 공영주차장 건립 소방공사 외 2건

○ 공사내용: 금호동1가 주차난 해소를 위한 공영주차장 건립에 따른 소방공사

○ 공사금액: 금211,765,280원

- 소방공사: 200,215,280원, 소방감리용역: 10,500,000원, 기술지도용역: 1,050,000원

○ 계약업체: **************

○ 공사기간: 2024. 2. 22. ~ 2024. 4.30.

○ 예산과목: 토목과, 주차문화개선, 주차환경개선, 공영주차장 조성 및 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성부서: 교통지도과)

토목과, 주차문화개선, 주차환경개선, 금호동1가 공영주차장 증축조성, 시설비 및 부대비, 감리비(예산편성부서: 교통지도과)

□ 준공기한 연기 사유

○ ******************************************************************************

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

- 소방공사 및 재해예방기술지도 용역

- 당초: 2024. 4. 30. 까지 ⇒ 변경: 2024. 5. 20. 까지

- 소방감리 용역

- 당초: 2024. 5. 10. 까지 ⇒ 변경: 2024. 5. 30. 까지

- 연기사유 귀책소재: 성동구청

- 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  준공기한 연기 의뢰서 각 1부.  끝.