문서번호	급수운영과-7573
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
유미진		박상열	04/26
			代박상열
협조

단수 계획 보고

(서대문구 북가좌동 75번지 일대)

2024. 04.

서부수도사업소

(급수운영과)

단수 계획 보고

(서대문구 북가좌동 75번지 일대)

서대문구 관내 상수도공사(장기사용) 중 ******************* 노후 상수도관 교체공사와 관련한 단수계획 보고임.

□ 공사현황

❍ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속)

❍ 공사위치:*************************

❍ 공사일시: 2024. 04. 30.(화) ~ 2024. 05. 03.(금)

❍ 공사개요: *************

❍ 시공업체: (주)운악건설 대표 ***

❍ 위 치 도

****

□ 수계현황

❍ 급수수계: *********************

❍ 시설용량: *******

❍ 시설수위: ****************

❍ 표    고: *********************

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역: *****************

❍ 단수세대: ************

❍ 수    압: 3.9 ~ 4.1㎏/㎠

❍ 단수일시: 2024. 04. 30.(화) ~ 2024. 05. 03.(금) 10:00~17:00

※ 공사기간 중 주간 시간대만 단수

❍ 작업(단수) 시간: 7시간

- 기존관 절단 및 부설(5시간 30분) + 밸브실 정비(1시간) + 세척 및 통수(30분)

❍ 단수계획도

****

(※DMC래미안클라시스아파트 및 상가 임시급수로 단수 없음)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수계획

- 제수밸브 잠금: 2개소

연번	위치	밸브용도(형식)	구경(㎜)	밸브개·폐	수계조절 담당
*	**********	**	***	***	*** *** ***
*	***********	**	***	***

- 퇴수위치: 1개소

연번	위치	퇴수종류	구경(㎜)	비고
*	***********	*****	***

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 공사 완료 후 충분한 관세척(소화전 이용) 및 수질검사 실시

- 통수 후 주변 수질상태 모니터링

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 GIS 단수지역 등록

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

❍ 상기 추진계획에 의거 『2023년 서대문구 관내 상수도공사』 계약업체인 (주)운악건설 대표 ***에게 작업지시하여 공사에 만전을 기하고자 하며, 시공물량은 추후 정산시 반영코자 함.

❍ 통수전 수질검사 의뢰: 행정지원과.

붙임  1. 단수계획서 1부.

2. 단수안내문 1부.  끝.