문서번호	환경녹지과-1940
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경관리팀장	환경녹지과장
정동열		윤희권	전결 04/29
			강병기
협조

2024년 봄철 매립지사면 수목 식재 완료 보고

2024. 04.

서부공원여가센터

(환경보전과)

2024년 봄철 매립지사면 수목식재 완료 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리 센터 2024년 봄철 매립지사면 수목식재를 완료하고 다음과 같이 보고 드림.

□ 식재개요

ㅇ 위    치 : 하늘공원 북동사면 1개소

ㅇ 면    적 : 약 800㎡

ㅇ 식재수량 : 200주(이팝나무 100, 복자기 100)

ㅇ 식재기간 : 2024. 04. 18. ~ 04. 26.

**************************

********************

□ 식재 결과보고

ㅇ 수목 납품 현황

- 계약일자 : 2024. 04. 05.

- 납품기한 : 2024. 04. 19.

- 납품일자 : 2024. 04. 18.

- 검사요청일 : 2024. 04. 23.

ㅇ 수목 식재 결과

- 2024. 03. 22. ~ 04. 17. : 덩굴 및 지장목 제거, 구덩이파기  등 사전작업

- 2024. 04. 18. ~ 04. 19. : 수목식재

- 2024. 04. 22. ~ 04. 26. : 지주목 및 관수라인 설치 등

□ 보고자 의견

ㅇ 수목납품 및 식재가 완료되어 수목구매 검사(검수) 처리하고자 함.

붙임  1. 수목식재 현황사진 1부.

2. 검사검수요청서 1부.  끝.