문서번호	토목부-8644
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
송진수		이성주	04/30
			이임섭
협조
	주무관		전용현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -  실정보고(사토장 변경 및 토사반출) 검토 보고

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교, 보행교 건설공사 -

실정보고(사토장 변경 및 토사반출) 검토 보고

2023. 4.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교, 보행교 건설공사 -

실정보고(사토장 변경 및 토사반출) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 및 보행교 건설공사 사토장 변경 및 토사반출 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

※ 관련근거 : 창동상계 제23-134호(2023.04.26.) 및 제23-141호(2023.05.02.)

□ 공사 개요

ㅇ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

ㅇ 규    모 :  보차도교신설 : 폭 32.0m, 연장 118.0m

ㅇ 사업기간 :  총차: ′21.04.19.∼′25.05.31. [3차: ′23.12.16.∼′24.12.31.]

ㅇ 총공사비 :  22,500백만원 (도급비 21,045백만원, 관급자재비등 1,455백만원)

ㅇ 시공사/건설사업단 : 하웅종합건설㈜ 외 1개사 / ㈜동해종합기술공사 외 2개사

□ 추진 경과

ㅇ ′24. 04. 12 : 서울 아레나부지내 토사 및 자재 임시야적 요청협의

→ 아레나사업 시행으로 임시야적 불가 통보

ㅇ ′24. 04. 16 : 현안보고 (보차도교 사토처리의 건) (감리단→발주처)

ㅇ ′24. 04. 17 : 수방기간 현장철수 및 토사반출작업지시 (발주처→감리단)

ㅇ ′24. 04. 22 : 서울시 토사반입 가능현장 부재로 외부 사토장 선정 지시(발주처→감리단)

□ 실정보고 검토

	실정보고 내용
ㅇ 서울아레나 부지 및 본부 내 공사장 사토 반입 불가 ㅇ 설계에 반영된 김포매립지 또한 토사 반입 불가로 사토장 변경 ****************************************

ㅇ 실정보고 사유

*****************************************************************************

******************************************

****************************

ㅇ 사토장 선정

- 위  치 : ****************************

- 운반경로 검토

*

ㅇ 수량 증·감 내역

공 종 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
******	****************	*	*	******	*********
******		*	*	******	*********	********

ㅇ 공사비 증·감

- 보차도교 : ************                            (단위: 천원)

공 종 명	규 격	당초	변경	증⦁△감	비 고
******	****************	*	*******	*******
*****		*	*******	*******
*********************		**	*****	*****
*****		*	******	******
******		*	*******	*******
********		*	******	******
****		*	*******	*******	**************

ㅇ 신규 단가 협의

【보차도교】

- 협 의 일 : *************

- 참 석 자 : 발주처 공사담당 *** / 시공사 현장대리인 ***

- 협의결과 : 신규비목에 대해 계약상대자의 책임없는 사유로 협의율 적용(*******)

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
사토 운반	*********************	**************	************************************

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 당초 설계에 반영된 사토장 및 인근 공사장 토사 반입 불가에 따른 사토장 변경 실정보고는 적정한 것으로 판단되며 향후 설계변경 시 반영하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서(보차도교) 1부.  끝.