문서번호	급수운영과-7316
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	정수용	권오정	04/30
			정진일
협 조

’24년 구로구 시설물공사 발주계획

’24년 구로구 관내

상수도시설물 설치 및 보수공사 발주계획

2024. 4월

강서수도사업소

(급수운영과)

2024년 구로구 관내

상수도시설물 설치 및 보수공사 발주계획

우리사업소에서 관리하고 있는 구로구 관내 상수도시설물에 대하여 아래와 공사를 발주하여 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2024년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 공사개요 : 밸브 및 변실 교체 D80~600㎜, 105개소 등

○ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2025.06.30.

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 설계금액                                          (단위:천원)

구분	총 공사비	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
총 부기금액	803,592	603,592	100,000	100,000
1차수(2024년)	558,000	423,000	70,000	65,000
2차수(2025년)	245,592	180,592	30,000	35,000

□ 추진내용

○ 물량산출 : 최근 3년(’21~’23년) 공사 평균 산출

○ 설계단가 : 2024년도 상수도공사 기본품셈단가 적용(안전조사과-737, 2024.1.22)

○ 계약심사 완료

- 관련문서 : 본부 안전조사과-4309(2024.4.24.)

	• 설계금액	:	603,592	천원
	• 심사금액	:	600,630	천원(감2,962천원)

- 심사결과

□ 발주방법(입찰참가자격 등)

○ 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 상․하수도설비공사업 등록업체로

주된 영업소재지가 입찰공고일 전일까지 서울특별시 소재한 업체

○ 전문건설업으로 입찰참가자격을 제한

	입찰공고문 : 제한사유
※ 본 공사는 상호시장 진출을 허용하지 않는 공사입니다. - 상·하수도설비공사업 전문공사 제한사유 : 본 공사는 복잡한 도심지의 불특정 장소 및 시간에 발생되는 수돗물 소·불출수, 상수도관 돌발누수, 상수도시설물 고장 등 시민 생활과 직결되는 공사가 다수 포함된 공사로서 신속한 시민불편을 해소해야 하는 공사특성상 상수도 분야에 경험과 노하우가 필요하므로 전문공사 업체로 참가자격을 제한합니다.

※관련공문 : 건설산업 기본법 개정․시행에 따른 상수도 연간단가계약공사 발주방법 검토보고                      [누수방지과-4413(2021. 4.23.) 본부 방침]

□ 향후 일정

○ 공사 시행 및 계약의뢰 : 2024.05.

- 계약기간 : 착공일로부터 ~ 2025.06.30.

· 1차수 : 착공일 ~ 2024.12.31.

· 2차수 : 2025.01.01. ~2025.06.30.

○ 공사 체결 및 착공 : 2024.06.

붙임  1. 설계 내역서 1부.

2. 건설산업기본법 관련 본부 방침서 1부.

3. 설계심사 결과통보 1부.

4. 설계심사 검토서 1부.  끝.