아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2024년 선유도공원 노후시설물 정비공사 준공기한 연장 시행

1. 여의도공원관리사무소-2988(2024. 4. 29.)와 관련입니다.

2.「2024년 선유도공원 노후시설물 정비공사」에 대하여 아래와 같이 준공 기한 연장을 하여 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 2024년 선유도공원 노후시설물 정비공사

나. 공사기간: 2024. 3. 18. ~ 2024. 5. 1.

다. 계약금액: ******************************

라. 계약업체: ****************

마. 준공연장내용

구분	계약기간	비고
당초	2024. 3. 18.~ 2023. 5. 1.
변경	2024. 3. 18.~ 2023. 5. 30.	29일 연장

바. 연장사유 귀책 소재: 서부공원여가센터

사. 지체상환금 부고여부: 미부과

아. 준공기간 연장사유: 수로관 방수 등 추가 공정 시행

붙임  1. 방침서 1부.

2. 합의서 1부.   끝.

	여의도공원관리사무소장
주무관	진덕성		팀장	황의식		여의도공원관리사무소장	04/30
이정수
협조자	재무팀장	전선훈
시행	여의도공원관리사무소-3014	(	2024. 4. 30.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 선유로 343, 선유도공원관리사무소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2631-9367	/전송	02-2631-9373	/	dschin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)