문서번호	급수운영과-7834
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
양동혁		신정우	전결 05/01
			채재일
협조

시공계획서 검토 보고

(2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

2024. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

시공계획서 검토 보고

(2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

급수운영과장: 채재일 ☎3146-3640 급수관리팀장: 신정우 ☎3649 담당: 양동혁 ☎3648

서울시설공단에서 제출한「2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사」의 시공계획서 검토보고서(품질시험계획서 포함)의 검토사항을 보고 드림.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간 : 2024. 4. 1. ~ 2023. 12. 6.

ㅇ 도 급 비 : 568,616,800원

ㅇ 공사개요 : D=80~200mm, L=1,476m

ㅇ 도 급 자 : 태성건설 대표 홍영인

□ 검토내용 및 의견

구 분	검 토 내 용		지 시 내 용	검토의견
공사현황	기간, 금액, 규모 등 작성 적정여부	- 적정함		원안사항
현장조직	현장대리인 적정 여부	- 현장대리인은 건설산업기본법 시행령 제35조 제2항 별표5에 의거 30억 미만 공사의 책임자로서 본 공사의 현장 대리인은 적정함 현장대리인 이중배치 여부 확인(KISCON)	- 현장 상주토록 지시 - 현장 대리인 변경 필요 시 즉시보고 및 선임계 제출	원안사항
현장조직	비상연락체계의 적정성 여부	- 확인 결과 적정함	- 민원 및 긴급상황 발생 시 긴급조치 가능토록 조치	원안사항
	안전관리자 선임 여부	- 산업안전보건법 제17조 시행령 제16조에 의거 건설업 50억원 이상인 경우 동법 시행령 별표3 기준에 해당되는 안전관리자 선임토록 규정하는바, 본 공사에는 의무 사항은 없음	- 현장대리인 겸임 (안전담당자 겸임가능)	원안사항
	품질관리자 선임 여부	- 건설기술진흥법 시행규칙 제 50조 4항 별표 5에 의거 초급품질관리대상(초급기술자1명이상)에 해당하는 공사로 품질관리자 선임은 적정함	- 관련규정 및 품질시험계획에 의거 품질관리 철저 지시 - 기본 교육 이수 후 증빙자료 제출	원안사항

공정관리 계획	세부공정표 및 공정관리계획 적정여부	- 공정별 착수, 완료시점, 선‧후 연관관계 등 적정함 - 계약 공기 내 공정관리 계획 수립 및 공정관리계획표 작성내용 적정함	- 공사일정이 변경되거나 부진공정 발생시 수정공정관리계획 작성하여 제출	원안사항
주요공종 시공절차 및 방법	구간별 현장 여건을 고려한 시공계획 작성 여부	- 현장여건 및 시방기준에 맞게 작성됨 - 주요공종의 종류 및 현황, 시공흐름, 시공절차 및 세부시공방법 등 제출된 시공계획서 검토결과 적정하며 현장적용 가능하다 판단됨	- 현장여건이 상이한 경우 실정보고 및 감독 승인을 득한 후 공사시행 지시 - 설계검토보고회 개최 시 세부사항 추가 검토	원안사항
주요장비 자재 인력투입 계획	공종별 예정공정에 따른 자재, 장비, 인력투입의 적정성	- 각 공종별 예정공정에 맞는 자재, 장비, 인력의 구성, 수량, 규격 등 적정함	- 공사일정이 변경될 경우 변경계획 작성 제출 - 해당공종 착수전 실 투입될 장비작업계획서 별도 제출	원안사항
품질시험 계획	품질시험계획 적정 여부	- 건설기술진흥법 시행령 제89조에 의거 공사금액이 5억이상의 토목공사로 초급품질 관리대상의 공사로 품질시험계획 수립대상임 - 각 공종의 품질확인을 위한 시험종목, 계획물량, 시험빈도, 횟수 및 시험장비, 규격 등 제반기준에 의거하여 적정함 - 현장규모 및 여건을 고려한 공인기관 품질시험 의뢰예정으로 시험실 설치 계획 없음	- 품질시험계획은 발주청 승인 사항으로 별도 검토 후 승인 요청 예정	원안사항
안전관리 대책	안전관리대책 가이드라인에 의거 안전관리대책 정정여부	위험성평가 실시규정 적정여부 안전점검 및 교육계획 적정여부 유형별 안전관리대책 적정여부 산업안전보건관리비 사용계획 정정여부 최초위험성평가 위험요인 누락 등 적정여부 극단적 상황대비 시니리오 작성 적정여부	- 산업안전보건관리비 사용내역 제출 철저 - 수시위험성평가 이행 철저	원안사항
환경관리 계획	환경관리계획 적정 여부	제반법령 준수여부, 저감조치의 적정여부 환경보전비 사용계획의 적정여부 공사장 소음공해 방지대책 여부(저소음 발전기 사용)	- 민원예방을 위해 소음 비산먼지발생 방지철저 환경관리를 위해 보전비 사용시 검수 확인 작업 전 저소음 장비 확인 철저	원안사항
지장물 처리계획	지장물처리계획 적정 여부	- 조사 개요(조사방법, 위치, 일정, 투입자원(장비,인력), 작업수량), 복구방법, 위치도 등 적정함		원안사항
교통관리 계획	교통관리계획 적정 여부	- 도로(교통)현황, 공사현황, 점용현황, 교통안전시설 설치 등 교통관리계획도 작성내용 적정함		원안사항

□ 공사현황

ㅇ 검토결과, 시공계획서 및 품질시험계획서가 적정하게 제출 되었으므로 원안 시행으로 시공 및 품질관리가 이루어지도록 시공계획서 승인 통보하고자 합니다.  끝.