문서번호	기획관리과-4631
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박필관		조윤홍	05/01
			임승철
협조

데이터센터 리모델링 설계용역 시행 계획

2024. 5.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

데이터센터 리모델링 설계용역 시행 계획

데이터센터의 취약한 구조물을 보강하고, 향후 시스템실을 확충하기위한 리모델링 설계용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 데이터센터 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 완료결과(기획관리과-9225, '23.9.25.)

- 데이터센터 리모델링 공사시 구조 보수보강 내역 반영

❍ 서울시 데이터센터 발전방향 ISP(Ⅲ. 목표모델 수립, '21.10. 1.)

- 1층 및 2층을 전산실로 활용하기 위해서는 적극적인 면진·내진대책 필요

- 정보자원, 데이터의 폭발적 증가에 대비하여 서버실 사전확보 필요

□ 추진배경

❍ 전산자원, 데이터의 폭발적 증가에 대비하여 서버실 확충 필요

❍ 현재 데이터센터는 '94년 준공된 일반 건축물로 전반적으로 노후되어있고, 서버실 용도에 부적합하여 용도 변경 필요

❍ '23년 실시한 데이터센터 정밀안전진단 결과에 따른 구조보수보강안을 반영하여 시설물의 전체적인 안전성 확보 필요

□ 사업개요

❍ 소 재 지 : 서초구 남부순환로340길 49

❍ 사업대상 : 데이터센터 1, 2층(대상면적 : 1,361㎡)

❍ 사업규모 : 1,2층(교육장·사무실)의 서버실 용도 변경·공간조성

※ **************************************

❍ 사업내용

- 1, 2층 서버실 리모델링(건축·소방) 공사를 위한 공사내역 산출

- '23년 실시한 구조진단 결과에 따른 보수보강내역 반영 등

Ⅱ		세부추진계획

□ 용역 발주 전 사전절차 검토

❍ 계약심사 : 해당없음

- 2024년 한시적 계약심사 제외부서 지정(계약심사과-20159, '23.12.29.)

❍ 기술용역 타당성 심사 : 대상

- 심사대상 : 추정가격 15백만원 이상, 엔지니어링산업진흥법 및 기타 개별법에서 정한 기술용역

□ 용역 발주 실시

❍ 계약방법 : ****

************************************

**************

**************************************************************************

❍ 계약업체 : *****************

❍ 과업기간 : 착수일로부터 60일

❍ 소요예산 : ************************

❍ 사업기간 : 2024. 5. ~ 7.(착수일로부터 60일)

- 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적운영, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지관리, 일반운영비, 시설비

❍ 주요 과업내용

- 공간 내부설계에 필요한 각종 측량 등 현장조사

- 교육장 및 용역사무실의 서버실 공간 조성에 관한 실시설계

- 과업지시서 및 용역계약서에 따라 공사발주를 위한 설계도서 작성

- 리모델링 사업비 및 공사기간 산정

- 세부 공사시행에 대한 자문 및 기타 발주기관이 정하는 사항 등

Ⅲ		행정사항

□ 1층 IT 교육장 철거 및 서버실 조성 관련 협의(인재개발원)

□ 2층 스마트워크 철거 및 서버실 개축 관련 협의(전 부서)

□ 용역 진행기간중 과업내용 및 진행에 대해 통신·시스템실 담당직원 협조 등

Ⅳ		추진일정

□ 2024. 5. : 기술용역 타당성심사 의뢰(기술심사담당관)

□ 2024. 5. : 용역 계약 및 착공

□ 2024. 7. : 용역 준공 및 대가 지급

붙 임:   1. 설계내역서 1부.

2. 설계지침서 1부.  끝.