문서번호	녹지관리과-3890
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	녹지관리과장
박성희	05/02
	이무림

『뚝섬한강공원 편의시설 정비(도색)공사』

준공기한 연기 보고

녹지관리과

『뚝섬한강공원 편의시설 정비(도색)공사』

준공기한 연기 보고

2024 서울국제정원박람회와 연계하여 『뚝섬한강공원 편의시설 정비(도색)공사』이행 중 추가 물량 발생 등으로 준공기한 연장하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 뚝섬한강공원 편의시설 정비(도색)공사

□ 위    치: 뚝섬한강공원 서울국제정원박람회 일대

□ 공사내용: 편의시설(파고라, 벤치) 등 도색

□ 공사기간: 2024. 04. 12. ~ 05. 06.

□ 계약금액: 금45,000,000원(금사천오백만원)

□ 계약업체: 주식회사 유정엘앤씨 대표 황정희

Ⅱ		준공기한 연기

□ 공사기간

구 분	공 사 기 간	비 고
당 초	2024. 04. 12. ~ 05. 06.
변 경	2024. 04. 12. ~ 05. 15.

□ 연기사유: 본 공사 이행 중 도색 추가물량 발생, 우천일수 증가로 준공기한 연장 필요

□ 귀책소재 및 지체상금 부과

- 귀책소재: 한강사업본부

- 지체상금: 미부과

Ⅲ		향 후 계 획

□ 상기와 같이 『뚝섬한강공원 편의시설 정비(도색)공사』준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.