문서번호	도로보수과-3955
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
심영우		안동국	05/02
			이경우
협조

「2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외 1개소 정밀안전점검 용역」

변경계약(1차) 검토 보고

2024.  5.

강서도로사업소

(도로보수과)

- 2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외 1개소 정밀안전점검 용역 -

변경계약(1차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중인『2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외 1개소 정밀안전점검 용역』현장여건 반영 등으로 계약물량 변경을 위한 변경계약 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 금오(업무)제24-192호(2024.4.29.)

- 실정보고서 및 계약변경내역서(전·후) 제출의 건

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명: *********************************************

○ 용역기간: ********************

○ 용 역 비: ********

○ 도 급 자: ******************

Ⅲ		보고내용

○ 변경계약 사유

- 비부착, 비접촉식 계측장비 추가로 옹벽 기울기 변화를 실시간으로 측정하여 대상 구조물의 거동분석을 위함임

- 자문회의 필요성 낮아 자문회의 미실시(자문회의비 삭감)

○ 용역비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
1. 직접인건비		10,616,563	10,616,563	-
2. 제경비		12,508,218	12,508,218	-
3. 기술료		4,604,652	4,404,652	감) 200,000
4. 직접경비		4,051,294	4,051,294	-
5. 선택과업비		719,752	719,752	-
6. 안전시설비		44,976	44,976	-
7. 추가과업		-	200,000	증) 200,000
	1) 계측 데이터 활용	-	200,000	증) 200,000
공급가액		32,545,455	32,545,455	-
부가가치세		3,254,545	3,254,545	-
자문회의비		300,000	-	감) 300,000
총 용역비		36,100,000	35,800,000	감) 300,000

Ⅳ		조치계획

○ ***************************************************************

붙임  1. 변경 내역서 1부.

2. 실정보고서 제출 공문 1부.  끝.