문서번호	여의도공원관리사무소-3171
결재일자	2024. 5. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
보라매공원관리팀장	여의도공원관리사무소장
윤석환	05/05
	이정수

보라매공원 북동산 숲길정비공사 실정사항 보고

2024. 5.

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

보라매공원 북동산 숲길정비공사 실정사항 보고

여의도공원관리사무소장 : 이정수☎780-2712, 보라매공원관리팀장/담당 :윤석환☎2181-1171

보라매공원 북동산 숲길정비공사 시행 중 수급이 어려운 수종에 대한 대체식재 등 설계변경하고자 합니다.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 보라매공원 북동산 숲길정비공사

ㅇ 공사내용: 흙막이 및 횡단배수로 설치, 수목식재 등

ㅇ 공사기간: 2024. 4. 16. ~ 5. 10.

ㅇ 총공사비: ************

***************************************

□ 실정사항

ㅇ 황금국수나무의 수급이 어려워 서울식물원 양묘장 국수나무를 무상 공급받아 식재하고자 함

- 황금국수나무: 800 → 0주

- 국수나무: 0 → 1,440주

□ 예산변경 사항: 변경없음

(단위: 원)
구분		당초	변경	증감
총공사비		**********	**********	*
도급액	공급가액	**********	**********	*
	부가가치세	*********	*********	*
	소계	**********	**********	*
관급자재대		**********	**********	*

□ 향후계획

ㅇ 상기와 같이 내역 설계변경하고자 합니다.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.  끝.