아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2024년 선유도공원 포장 정비공사 설계변경 시행

1. 여의도공원관리사무소-3184(2024.5.07.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 추진하고 있는 「2024년 선유도공원 포장 정비공사」의 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 2024. 선유도공원 포장 정비공사

나. 공사기간: 2024. 3. 25. ~ 2024. 5. 23.

다. 계약금액: 금88,705,460원

라. 도 급 자: (주)탄탄컨스텍 대표 박상렬

마. 설계변경 금액

(단위: 원)

구분		공사비(원)		증·감(원)	비고
		당초	변경
도급비	공급가액	80,641,327	76,181,819	감 4,459,508
	부가가치세	8,064,133	7,618,181	감 445,952
	소 계	88,705,460	83,800,000	감 4,905,460
관급자재비		73,390,000	78,293,000	증 4,903,000
총 액		162,095,460	162,093,000	감 2,460

바. 변경사유: 현장여건상 물량 증감 및 위치 변경 등으로 설계변경하여 추진하고자 함

사. 예산과목: 서부공원여가센터 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 실정사항 보고서 1부.

2. 설계변경 도면 및 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 설계변경 합의서 1부.  끝.

	여의도공원관리사무소장
주무관	진덕성		팀장	代진덕성		여의도공원관리사무소장	05/08
이정수
협조자	재무팀장	전선훈
시행	여의도공원관리사무소-3237	(	2024. 5. 8.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 선유로 343, 선유도공원관리사무소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2631-9367	/전송	02-2631-9373	/	dschin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)